아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	현장실정보고(3차) 회신(가락공동구 대체관로 구축공사)

1. 공사감독2처-12229(2023. 10. 10.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『가락공동구 대체관로 구축공사』의 실정보고(3차)에 대하여 우리 사업소 검토 의견을 아래와 같이 회신하오니, 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

연번	실 정 보 고 내 용	회 신 내 용
1	○ 종점부 연결 불가 - 종점부 D=150mm 밸브 연결이나 상수관망도에 나와있지 않은 기존관 발견 - 연결공사를 위한 작업시 단수구역 및 기존관 확인 필요	- 현장조사로 공동구 내에 기존관 D=150mm를 확인 하였으며, 발견된 기존관은 현재 오금배수지수계로 거여동 일부 지역에 유입되는 유일한 유입관로로 확인돼 단수 후 작업이 불가능한 실정이며, - 당초 설계된 종점부 D=150mm밸브 연결을 부단수 분기(D150/150)로 시행하도록하고, 설계변경시 반영하시기 바람. ※ 부단수위치는 첨부문서 참조

붙임  분기부 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	10/12
이규희
협조자
시행	급수운영과-16706	(	2023. 10. 12.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)