문서번호	기획관리과-9593
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김석광		조윤홍	10/11
			추경수
협조
	주무관		소순선

- 데이터센터 노후 UPS 교체사업 -

공사·용역 연장 검토보고

2023.  10.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

- 데이터센터 노후 UPS 교체사업 -

공사·용역 연장 검토보고

우리 사업소에서 추진하고 있는 「데이터센터 노후 UPS 교체 사업」과

관련하여 공사·용역 연장에 대하여 검토보고 드림

Ⅰ		관련 근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장(제7절 2.계약기간의 연장) 지방자차단체 입찰 및 계약집행기준 제15장(제7절 2.계약기간의 연장

Ⅱ		계약 현황

구분	계약명	상호	대표자	계약금액 (원)	착공일자 (착수일자)	준공기한 (완수일자)
공사	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사	*****	***	***********	'23. 9. 8.	'23.11.30.
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 감리용역	******* ****	***	**********	'23. 8.14.	'23.11.30.
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 건설재해예방 기술지도 용역	******* ******	***	*******	'23. 9. 1.	'23.11.30.

Ⅲ		기한 연장 검토

□ 연장사유

ㅇ 당초 UPS교체 일정이 '23.10.20.(금) ~ 10.23.(월) 예정이였으나

'24년 예산작업, 연말 회기년도 마감, 국정감사, 시의회 개최 등으로

시스템 사용을 중단할 수 없어, 2024년으로 UPS 교체일정이 연기됨

□ 계약 변경내용

ㅇ 계약금액 : 변경 없음

ㅇ 귀책소재 : 서울특별시 데이터센터

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 준공 기한(완수 일자) 변경

- 당 초 : '23. 11. 30.

- 변 경 : '24.  3. 31.

구분	계약명	당초준공기한 (완수일자)	변경준공기한 (완수일자)	비 고
공사	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사	'23.11.30.	'24. 3.31.	증122일
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 감리용역	'23.11.30.	'24. 3.31.	증122일
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 건설재해예방 기술지도 용역	'23.11.30.	'24. 3.31.	증122일

□ 조치계획

ㅇ 2024년으로 UPS 교체일정이 연기되었는바 교체 일정에 맞추어 UPS

교체 전기공사, 감리용역 및 건설재해예방지도 용역을 기한연장하여

본 사업 추진에 만전을 기하고자 함.  끝.

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서(안) 각 1부.

2. 합의각서(안) 각 1부.  끝.