아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인(조경식재 실정보고))

1.업무지시현장 : 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 주식회사 도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2023-10-12 09:10:16

3.지 시 내 용

가. 천호남단(감리) 제2023-271호(2022.10.10.)호와 관련입니다.

나. 천호대교 남단IC 연결체계 개선공사 관련, 귀 건설사업관리단에서 승인 요청한

조경식재 실정보고건에 대하여 승인통보합니다.

다. 해당 건은 설계변경 소위원회 상정 대상으로 12월 3차 준공 전 조경공기 확보를          위해 즉시 절차를 이행하여 주시기 바라며, 실정보고 승인에 따른 향후 계약금액         조정은 소위원회 결과 등 우리본부 설계 변경 절차 등에 따라 최종 조정될 수

있음을 알려드립니다.  끝.

※ 조경분야 설계변경 소위원회 일정 : 10.19.(목)

주무관	김혜연		공원시설과장	오성훈		방재시설부장	10/12
이동훈
협조자	주무관	신주영
시행	방재시설부-12226	(	2023. 10. 12.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2455	/전송	02-6438-2459	/	kimhy14@seoul.go.kr	/	부분공개(5)