실정보고 검토서

[천호대교 남단IC 연결체계 개선공사]

공사명

천호대교 남단IC 연결체계 개선공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 송파구 천호대교 남단IC 일원

· 규    모 : 연결로 구조개선 및 도로확장

· 공사기간 : '20.11.~'25.11.

· 공 사 비 : 369억원(조경3.23억원)

·시공사: 대우산업개발(주) 외1               (조경하도급 :다우조경)

·감리단: (주)도화 외4

·설계사: 제일엔지니어링 외1

실정보고 건명

수목식재를 위한 관계기관 요청사항 설계반영

보고배경

· 공사계획변경(문화재 출토에 따른 공사축소) 검토 지연으로 준공기한         (‘23.12.31.) 도래하여, 공사계획 변경 외 구간에 대하여 우선 시공하고자     관계기관 협의사항 반영하여 실정보고 하는 사항임

실정보고

사유

·올림픽대로 중앙 및 연결로 녹지구간(3개소), Ramp-A,D(2개소) 등

5개소 조경식재에 대한 서울시설공단의 협의 사항 반영

·사가정~ 암사대로 구간 관련, 구리시 녹지과 협의 결과 반영

(수형 불량 및 병충해 수목으로 당초 이식→제거 및 신규식재로 변경)

건설사업관리단

검토의견

·상기 천호대교 남단 올림픽대로 연결로 등 5개소의 조경공사 실정보고는   관계기관의 협의내용을 반영한 사항으로 적정한 것으로 사료됨

경(안)

-변경현황                                                      (단위: 천원)

구분		수량			금액증감	비고
		당초	변경	증·감
식재공	****	***	****	*****	*********
	****	*******	*******	*******	*********
	****	******	******	******	*********
	****	***	*	***	*********
	****	****	*	****	*********
	****	*	***	****	*********
시설물공	*********	****	*	****	*********
	***	*	****	****	*********
	*****	*	*****	*****	*********
임목폐기물	*****	*	********	********	*********
직접공사비					*********
제경비					*********
도급비 계					*********

***************************************************

************************

예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행가능
추가 행정절차 이행 필요여부	설계변경 자문위원회 안건상정(도급비 증 5천만원 이상)및 설계변경 계약(토목부)
발주처 검토의견	책임건설사업관리 기술인의 검토 의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 후 통보하여 설계에 반영하고자 함.
결재	주무관	김혜연	공원시설과장	오성훈	방재시설부장	10/12
						이동훈
	주무관	신주영	주무관	송진수