등록번호

주거정비과-14921

주무관

재정비촉진팀장

주거정비과장

도시정비국장

등록일자

이동욱

이종석

문형도

10/12

결재일자

2023. 10. 12.

공개구분

부분공개(5)

노경래

협  조

예산팀장

신해균

주무관

송주연

-좌원상가 도시재생 인정사업-

임시이주상가(가설건축물) 조성사업 명시이월 계획

서 대 문 구

-좌원상가 도시재생 인정사업-

임시이주상가(가설건축물) 조성사업 명시이월 계획

좌원상가 도시재생 인정사업을 위한 임시이주상가 조성사업이 금년도 어려운 상황으로 금년도 추경으로 확보한 예산을 명시이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 자방재정법 제50조 1항(세출예산의 이월)

□ 2023 회계연도 명시이월사업조서 제출 요청(기획예산과-16801)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 임시이주상가 조성

□ 위    치 : 서대문구 남가좌동 382-12번지

□ 사 업 비 : ***********

***********************************************

**************************************

□ 사업내용 :  좌원상가 정비사업 기간동안 기존 소상공인들을 위한

임시이주상가 조성

□ 추진경위

○ 2020.12.21. : 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 선정(3차)

○ 2021.05.06. : 가재울 9 재정비촉진구역 지정

○ 2021.05.12. : 사업시행자(LH)지정

○ 2021.08.26. : 주민대표회의 구성

○ 2022.04.18. : 설계용역 착수

○ 2022.10.09. : 설계용역 준공

3		명시이월 내역

□  예산과목 : 도시개발, 뉴타운개발, 자원상가 및 홍제역세권 정비사업,   시설비 및 부대비, 시설비, 좌원상가 임시이주상가(가설건축물)조성

□  이 월 액 : 금 *******************

단위; 천원
과 목					예산액	이월액	비고
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목
계					*******	*******
도시개발	뉴타운 개발	좌원상가 및 홍제역세권 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	**********	**********

□ 명시이월 사유

○ 임시이주상가 조성 공사 발주가 ‘23.11월에 예정으로 추경 1회에 확보한 예산을 연내에 집행할 수 없어 예산을 명시이월하여 사업추진에     만전을 기하고자 함.

4		향후계획

□  ’23.11. : 임시이주상가 조성공사 발주

□  ’23.12.~‘24. 6. : 임시이주상가 조성공사 시행

붙임 : 1. 명시이월조서 1부.

2. 추경1회 세출예산사업명세서 1부.  끝.