아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공사·용역 준공기한 연장 조치(데이터센터 노후 UPS교체 사업)

1. 기획관리과-9593(2023. 10. 11.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『데이터센터 노후 UPS 교체사업』과 관련한 공사 및 용역에

대하여 아래와 같이 준공기한을 연장 조치하고자 합니다.

가. 계약내역

구분	계약명	상호	대표자	계약금액 (원)	착공일자 (착수일자)	준공기한 (완수일자)
공사	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사	*****	***	189,564,550	'23. 9. 8.	'23.11.30.
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 감리용역	******* ****	***	20,416,000	'23. 8.14.	'23.11.30.
용역	서울시 데이터센터 UPS교체 전기공사 건설재해예방 기술지도 용역	******* ******	***	689,700	'23. 9. 1.	'23.11.30.

나. 연장사유 : 2024년으로 UPS 교체 일정이 연기되었는바 교체 일정에 맞추어 관련

공사 및 용역에 대한 준공기한 연장

다. 계약 변경내용

ㅇ 계약금액 : 변경없음

ㅇ 귀책사유 : 서울특별시 데이터센터

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 납품기한 변경

- 당초 : 2023. 11. 30.

- 변경 : 2024.  3. 31.

붙임  1. 준공기한 연장 검토보고서

2. 준공기한 연기의뢰서

3. 합의각서.  끝.

주무관	김석광		주무관	소순선		기획관리과장	10/12
조윤홍
협조자
시행	기획관리과-9646	(	2023. 10. 12.	)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49, 서울특별시 데이터센터 4층 기획관리과	/	seoul.go.kr
전화	02-3470-1491	/전송	02-3470-1544	/	ksk2050@seoul.go.kr	/	부분공개(5)