문서번호	기전설비과-9554
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상진		윤양호	10/16
			어용선
협 조
	주무관			문영민

자양취수장 수열시스템 신설공사

관급자재(냉난방기) 물량변경 검토 보고

2023. 10.

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

자양취수장 수열시스템 신설공사

관급자재(냉난방기) 물량변경 검토 보고

생산부장 :어용선☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호☎1330 담당 : 이상진☎1333

「자양취수장 수열시스템 신설공사 냉난방기 조달구매」관련 유지관리 부서(뚝도정수센터 정수시설과)의 요청사항 및 현장여건을 반영한 냉난방기 변경(추가) 내용을 보고 드림.

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 자양취수장 수열시스템 신설공사

ㅇ 위    치 : 서울 광진구 강변북로 2414(자양동 701) 소재 자양취수장

ㅇ 규    모 : 수열시스템(50RT) 관련 장비설치, 배관 및 자동제어 공사

ㅇ 공사기간 : 2023. 5. 30. ~ 2023. 11. 25.

ㅇ 공 사 비 : 495,607천원 (관급자재 별도 조달발주)

ㅇ 사업목적 : 수열에너지 활용 냉난방 시스템 신설 및 운영현황 모니터링을 통해 신재생(수열)에너지 보급확대 연구

□ 관급자재(냉난방기) 계약현황

ㅇ 계 약 명 : **************************

ㅇ 계약금액 : *********************************************

ㅇ 납품기간 : ***********************************

*******************************************************************************************************************************************************************************

□ 냉난방기 변경(추가) 검토

ㅇ 변경(추가) 대상 : *******************

ㅇ 관련 근거

**************************************

********************************************

********************************************************************************

ㅇ 변경(추가) 사유

*********************************************************************************

ㅇ 건설사업관리단 기술검토내용

- 실내기 장비변경 (펌프동 5개소, 염소동 1개소)

***		***	***	***
*****	***	************	**********	******* *************
	**	*************	*************	******* *******************
	***	*************	*************	******* ******************
	*****	*************	*************	******* ******************
	**********	**************	*************	******* *******************************
***
	******	************	*************	******* ***********************

- 실내기 장비추가 (펌프동 2개소, 염소동 1개소)

***		***	***	***
***	*****	*	*************	***************
	*****	*	*************	***************
***	*****	*	**************	***************

- 실내기 용량변경 검토*********************** 결과 적합함.

- 물량 변경내용

구 분		단위	단가 (원)	당 초		변 경		증·감(원)
				수량	금액(원)	수량	금액(원)
***	******** ***********	*	*********	*	*********	*	*********	***********
	********* **********	*	*********	*	*********	*	*********	*********
	************ ***********	*	*******	*	*********	*	*	***********
	************ *********	*	*********	*	*********	*	*********	*********
	************ *********	*	*******	*	*********	*	*********	*
	************ *********	*	*******	*	*	*	*********	*********
	************ *********	*	*******	*	*	*	*********	*********
*********	********	*	******	*	*******	**	*******	*********
	********	*	*******	*	*******	*	*******	*********
	*****		**********	*	*******	*	*******	*
	*******		**********	*	*******	*	*******	*
	*******		**********	*	*******	*	*******	*
	******	*	*******	**	**********	**	**********	**********
	**********	*	******	**	*******	***	*******	**********
	***********	*	******	**	*******	**	*******	*********
	********	*	******	*****	**********	*****	**********	***********
	*****	*	*****	***	*********	***	*********	**********
	*****	*	******	*	*******	**	*******	***********
	*******	*	*****	***	*********	***	*********	**********
	**********	*	******	**	*******	***	*******	**********
	***********	*	*****	***	*********	***	*********	**********
	*********	*	**********	*	*******	*	*******	*
	***	*	**********	*	*******	*	*******	*
**************					**********		**********	*********
*************					*******		*******	******
********					**********		**********	*********

***********************

- 냉매배관 등 옵션물량 변경

******************************************************************

************************************************************************************

**********************

□ 냉난방기 물량변경 및 추가구매 내용

구 분	계약상대자	계약금액(원)			비 고
		당초	변경(추가)	증·감
***		**********	**********	*********	***
***	*******	**********	**********	*	****
********	*******	**********	**********	*********	**** *****
********	*******	*	*********	*********	****

□ 보고자 의견

************************************************************************

*************************************************************************************************************************

□ 향후계획

*********************************************

붙임   1. 건설사업관리단 공문, 기술검토 의견서 및 관련 공문 각 1부.

2. 냉난방기 도면(기존, 변경) 1부.

3. 산출내역서 1부.

4. 물품매입(수량변경)요구서(변경) 및 물품매입요구서(신규추가) 각 1부.

끝.