문서번호	시설건설과-9903
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
박종혁		이승우	10/16
			전태호
협조

「재해예방 기술지도용역-동부간선 송배수관 정비공사」준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

「재해예방 기술지도용역-동부간선 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

2023.  10. 16. (월)

상수도사업본부

(시설부)

「재해예방 기술지도용역-동부간선 송배수관 정비공사」

준공기한 연기원 제출에 따른 검토보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박종혁☎1491

「재해예뱡 기술지도용역-동부간선 송배수관 정비공사」 관련하여, 준공기한 연기원 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제9장 제8절 2.) “계약기간의 연장”

○ HGSC 2023-T-10131(’23. 10. 13.)호 “용역계약 연장 요청서”

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 재해예방 기술지도용역(동부간선 송배수관 정비공사)

○ 용역기간 : ********************

○ 계약금액 : **********

○ 계 약 자 : ***********

□ 준공기한 연기 요청 현황

구분	당초	변경	비고
용역금액	7,500,000원	변경없음	-
용역기간	2022.10.6 ~ 2023.10.7	2022.10.6 ~ 2024.5.6	증) 211일

□ 연기 요청 사유

○ 대상공사의 실착공 지연으로 당초 용역기간 내에 과업수행이 불가하여 대상공사의 변경 준공기한(2024.5.6)까지 준공기한 연장코자 함.

□ 검토결과

ㅇ 연기요청 사유의 적정성 검토 : 적정

- 본 용역은 「산업안전보건법 제73‧74조, 시행령 제59~61조, 별표18‧19 등」에 의거 공사시작 후 15일(월2회) 마다 산업재해 예방을 위해 준수해야 하는 사항을 기술지도코자 계약된 용역이나,

- 대상 공사인 「동부간선 장기사용 송배수관 정비공사」의 지연 및 임시전기 분리발주에 따른 현장내 전기 공급 지연 등의 이유로 현장 실착공이 '23.10월 이후로 연기됨에 따라 본용역의 준공기한 또한 연기 요청한 사항임.

- 계약상대자의 준공기한 연기 사유는 발주기관의 책임으로 공사착공의 지연 및 발주기관의 필요에 따른 공사 설계변경에 해당되어

- “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제9장 계약일반조건) 제8절 2. 계약기간의 연장”에 의거 준공기한 연기 승인함이 타당함.

ㅇ 연기요청 기간의 적정성 검토 : 적정

- 대상공사의 준공기한 연기에 따른 용역 연기요청 기간 산출 적정함.

※ 대상공사(동부간선 장기사용 송배수관 정비공사) 준공기한 연기 현황

ㅇ 종합검토의견

- 상기사항과 같이 준공기한 연기 요청 사유 및 기간의 적정성 검토 결과 금회 변경사항은 적정한 것으로 판단되며 아래와 같이 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함.

구 분	당초	변경	비고
용역금액	7,500,000원	변경없음	-
용역기간	2022.10.6~2023.10.7	2022.10.6~2024.5.6	증)211일

- 귀책여부 : 계약상대자 귀책없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후 계획

ㅇ 재무회계과에 준공기한 변경 계약의뢰

- 변경계약 체결 완료 시 서울시설공단 및 대상공사 시공사에 통보하여 원활한 재해예방 기술지도가 이루어 질 수 있도록 함.

붙 임 : 1. 용역 계약 연장 요청 공문 1부.

2. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝.