문서번호	급수운영과-18722
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김태규	이훈재	10/16
		김상웅
협 조
	주무관		허준

「만리02-05 소블록 물세척 용역」 다용도 새들 점검구  납품 연기 보고

「만리02-05 소블록 물세척 용역」

다용도 새들 점검구 납품 연기 보고

2023.  10.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「만리02-05 소블록 물세척 용역 」

다용도 새들 점검구 납품 연기보고

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :김상웅☎2141 담당 :김태규☎2158

우리부서에서 시행중인 「만리02-05 소블록 물세척 용역」에서 사용할 다용도 새들 점검구를 납품 연기 보고임

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

ㅇ 만리02-05 소블록 물세척 용역 현장조사 결과보고 12991('23.07.13.)

□ 물품 구매 계약 현황

ㅇ 건    명: 만리02-05 소블록 물세척 다용도 새들 점검구 구매    ㅇ 구매물품: ******************************

ㅇ 계약업체: 부덕실업 주식회사 대표 김원택

ㅇ 계약금액: ******************************

ㅇ 납품기한: 2023. 10. 16.

ㅇ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(소블록배수관물세척추진 41201)

Ⅱ		보고 내용

ㅇ 우리부서에서 시행중인 「만리02-05 소블록 배수관 물세척」에서 구간 변경에 따른 다용도 새들 점검구 설치 장소 협의 중으로 새들 점검구 납품 연기가 필요한 실정임.

Ⅲ		행정 사항

ㅇ 안전사고 예방 및 철저한 배수관 물세척 과업수행을 위하여 다용도 새들 점검구 납품 기한 연기가 필요한 사항으로 계약상대자인 부덕실업(주) 대표 김원택에게 이를 통보하여 변경계약을 추진코자 함.

ㅇ 준공기한 연기 : 2023.10.16. -> 2023.11.30.

- 지체상급 부과여부: 미부과

붙임  합의각서 1부.  끝.