문서번호	행정지원과-16695
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
장주환	김덕기	최광운	10/17
			유재명
협 조

「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고(수정)

2023. 10.

강동수도사업소

행정지원과

「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

우리 사업소에서 진행중인「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사」와 관련하여 설계 변경 및 준공기한 연기에 대해 검토 후 보고하고자 함

Ⅰ		사 업 현 황

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계) 등 10건

ㅇ 공사개요 : 장애인용 승강기 1대(15인승,MRL식) 설치

ㅇ 계약현황

(단위 : 원)

계약 건명	업체	계약금액	계약기간	비고
『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)』	*********	***********	************ ***********
『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(전기)』	*******	**********	************ ***********
『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(소방)』	**********	**********	************ ***********
『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(통신)』	*****	*********	************ ***********
『청사 승강기 설치공사 건축감리용역』	**********	*********	************ ***********
『청사 승강기 설치공사 소방감리용역』	********	*********	************ ***********
『관급자재(승강기) 조달구매』	********	**********	************ ***********
『관급자재(창호) 조달구매』	*********	**********	************ ***********
『청사승강기 설치 관급자재(전망유리) 구매』	********	*********	************ ***********
『청사 승강기 설치공사 재해예방 기술지도용역』	**********	*******	************ ***********

Ⅱ		검 토 사 항

연번	변경내용	변경사유	공사비 증감	비고
1	공사 가설전기 설치	공사 장비 등의 사용에 필요한 가설전기시설 추가 반영	증)630,731
2	전등 추가 설치	2층 복도, 3층 통신실 및 창고, 4층 검침반 전등 7개 추가 설치	증)425,257
3	전기차 충전기 배선 이설	청사 외벽 승강기 설치 부분의 전기차 충전기 배선 이설	증)848,996

□ 설계변경 사항

ㅇ『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(전기)』

- 주요 변경사항

구분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공급가액	33,769,700	36,957,700	3,188,000
	부가가치세	3,376,970	3,695,770	318,800
	계	37,146,670	40,653,470	3,506,800

(단위 : 원)

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위 : 원)

□ 준공기한 연기 검토

ㅇ 공정현황

- 공정률 : 85%(2023. 10. 16. 현재)

- 잔여공정 : 승강기 기계, 창호 및 유리 설치, 내부 바닥 마감

ㅇ 연기기간

- 공사 준공기한(『강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)』외 3건)

: 2023.10.18. → 2023.11.03. (+16일 연장)

- 용역 준공기한(『청사 승강기 설치공사 건축감리용역』외 2건)

: 건축감리용역 - 2023.10.28. → 2023.11.17. (+20일 연장)

소방감리용역 - 2023.10.31. → 2023.11.17. (+17일 연장)

재해예방 기술지도용역 - 2023.10.18. → 2023.11.03. (+16일 연장)

- 물품 납품기한(『관급자재(승강기) 조달구매』외 2건)

: 2023.10.18. → 2023.11.03. (+16일 연장)

ㅇ 준공기한 연기 사유

- 마이크로파일 설치 공사 시 설계변경을 통한 추가공사

- 내부 인테리어 추가 공사(소장실 구조 변경 등)

- 6일간의 추석 연휴로 인한 공사 중단

- 공사 기간 중 비로 인한 공사 지연

ㅇ 계약업체 귀책 사유 : 없음

Ⅲ		행 정 사 항

□ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고  심의 결과에 따라 설계변경을 시행

□ 각 계약 건별 준공(납품)기한 및 공사금액 변경 시행.  끝.