문서번호	기전과-12228
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	10/17
			최경주
협 조

「금화터널 전광판(VMS, LCS) 제작구매설치」

착수 및 자재공급원 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「금화터널 전광판(VMS, LCS) 제작구매설치」

착수 및 자재공급원 승인 검토보고

「금화터널 전광판(VMS, LCS) 제작구매설치」착수 및 자재 공급원 승인 검토 보고 드림.

1		관련 근거

□ **************************

: 착수계 제출의 건(자재승인도서 포함)

2		사업 개요

사업 개요

□ 사 업 명 : 금화터널 전광판(VMS, LCS) 제작구매설치

□ 위    치 : 금화터널(서대문구 현저동 ~ 신촌동)

□ 사업목적 : 강화된 방재시설 설치기준 준수 및 도로터널 화재사고 발생 시 대응능력 향상을 위한 제연설비 설치와 병행 추진으로 터널 이용 시 원활한 통행을 위해 각종 안내 정보를 제공하고자 함.

□ 계약현황

- 계약업체 : ********************

- 계약기간 : 2023. 9. 27. ~ 12. 16.

- 계약금액 : ********************************

- 계약방법 : 지명경쟁입찰

□ 사업규모 : LED 문자전광판(VMS) 교체 1식

- VMS 2개소 2대 신규 설치

·터널 진입차단시설 상단 2개소(상·하행 각 1개소)

- LCS 6개소 12대 신규 설치

·터널 진입차단시설 상단 2개소(상·하행 각 1개소)

·터널 내부 제트팬 충돌방지 안내용 4개소(상·하행 각 2개소)

※ 제품 제작 시방 일부 수정

- 전광판 규격

구 분	VMS		LCS
	기존	변경	기존	변경
화면규격[mm]	5,700 × 1,200	5,760 × 1,280	600 × 600	640 × 640
LED 모듈 규격[mm]	300 × 300	160 × 160	300 × 300	160 × 160
LED 모듈 수량[EA]	76	288	4	16
픽셀 간격[mm]	18.75	10	18.75	10
화면 해상도[Pixels]	304 × 64	576 × 128	32 × 32	64 × 64

- 당초 LED 모듈 제작 사양보다 정밀한 고품질의 제품 공급을 계약상대자 측과 합의하였기에 이에 따른 제작시방을 수정하고 자재공급원 승인을 검토하고자 함.

공정 계획

< 공정 계획표>

3		검토 내용

자재승인 주요 목록

□ LED 모듈, 파워 서플라이, 메인 컨트롤러

검토 사항

□ 구매·제작시방서, 도면, 내역서 등의 규격 및 기준에 적합여부 확인

□ 각종 인증 및 증명서류 확인

- 인증서, 시험성적서, 카탈로그 등

검토 결과

□ 설계서 규격 및 기준에 적합 확인 및 각종 인증서류 정상 확인하여 승인 회신하고자 함.

4		향후 계획

행정 사항

□ 계약서 상 자재 수량 및 제작 상태 등 검수

□ 납품설치 물량 증감 등 변경 사항 발생 시 실정보고 접수 후 변경계약 검토

□ 납품서류 검토 후 물품검사조서 제출

추진 일정

□ '23. 10. : 자재 승인 회신

□ '23. 10. : 공장 검사(수) 실시

- 현지 공장 검사가 불가하면 자재 보관 현장 검사 대체

□ '23. 10. ~ 11. : 현장 설치

□ '23. 12. : 준공

붙임  1. 착수계 1부.

2. 계약서 1부.

3. 계약내역서 1부.

4. 수정 시방서 1부.  끝.