문서번호	기전과-12221
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	10/17
			최경주
협 조

「남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체 통신공사」

착공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체 통신공사」

착공 보고

「남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체 통신공사」착공 보고 드림.

사업 개요

□ 사 업 명 : 남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체 통신공사

□ 위    치 : 남산1,2,3호터널 입구 5개소

- 남산1호 1개소(상행), 남산2호 2개소(양방향), 남산3호 2개소(상행, 하행)

※ 남산1호 하행입구는 2020년 개선 완료

□ 사업목적 : 터널 통행 시민에게 각종 정보를 정확히 표출하여 안전사고 예방

□ 계약현황

- 계약업체 : *********************

- 계약기간 : 2023. 10. 10. ~ 10. 20. (착공 : 10. 10.)

- 계약금액 : ****************************

- 계약방법 : 수의1인견적(여성기업)

□ 사업규모 : LED 문자전광판(VMS) 통신공사 1식

- 터널 내부 광통신망 구축

공정 계획

공정구분	10월
	10일	11일	12일	13일	16일	17일	18일	19일	20일
착수신고
현장조사
자재입고 및 검수
남산1호터널 통신공사
남산2호터널 통신공사
남산3호터널 통신공사
시험
준공

행정 사항

□ 설계서에 따른 공사시행 여부 확인 감독

□ 공종 및 물량 증감 변경 사항 발생 시 실정보고 접수 후 설계변경 검토

□ 준공서류 검토 후 준공검사조서 제출

붙임  1. 계약서 1부.

2. 계약내역서 1부.

3. 착공계 1부.  끝.