문서번호	도로관리과-6122
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	지하안전팀장	도로관리과장	안전총괄관		재난안전관리실장 직무대리
윤진성	천석기	김만호	김혁		10/16
					최진석
협 조
	주무관			이창민

2023년 공동조사용역(1-2권역) 설계변경 검토

2023년 공동조사용역(1-2권역) 설계변경 검토

2023.  10.

재난안전관리실

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 공동조사용역(1-2권역) 설계변경 검토

도로관리과장 : 김만호☎2133-8150 지하안전팀장 : 천석기☎8180 담당 : 윤진성☎8138

우기철 이후 침하우려구간에 대하여 긴급조사를 시행하고자 「2023년 공동조사용역(1-2권역)」 설계변경하여 조사를 수행하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 집행기준(제14장 용역계약 일반조건 제6절)

- 「과업내용의 변경과 계약금액 조정」에 따라 업무량 및 금액 조정가능

ㅇ 2023년 공동조사용역(1-2권역) 과업내용서

- 「제10장 과업내용 변경 및 계약금액의 조정」에 관한 사항(㉱항)

㉱ 항 : 계약상대자와 발주기관은 ‘과업 업무량 조정으로 변경이 필요할 때’ 과업내용의 변경을 상호 요구할 수 있음

ㅇ 긴급 공동조사를 위한 재난관리기금 사용 계획(도로관리과-4612, ’23.9.18.)

- 현재 수행 중인 공동조사용역 과업수량을 추가하여 긴급 조사 시행

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2023년 공동조사용역(1-2권역)

ㅇ 계약기간 : 2023. 4. 19. ~ 2023. 11. 15.

ㅇ 계약금액 : 1,430,000,000원 (금일십사억삼천만원)

ㅇ 계약업체 : ㈜아이리스테크놀로지 (공동도급 : ㈜제이에스이앤씨)

ㅇ 과업내용 : 공동조사 1,063㎞, 목표공동 350개, 신속복구 298개

□ 검토사항

ㅇ 1,063㎞ 조사(13개 노선 및 굴착공사장 140개소), 공동 378개 발견

- 계획 대비 실제 조사연장 100% 수행완료 (발주 1,063㎞ → 시행 1,063㎞)

- 계획 대비 실제 공동발견 108% 초과달성 (목표 350개 → 실제 378개)

ㅇ 변경사유 : 우기철 이후 지반침하 대비 긴급조사 필요

****************************************************

*************************************************

****************************************************

[수량조정 내용]

·공동조사 연장 : (당초) 1,063㎞ → (변경) 1,403㎞ (증 340㎞)

·공동확인 수량 : (당초)  350개소 → (변경)  380개소 (증 30개소)

·공동복구 수량 : (당초)  298개소 → (변경)  325개소 (증 27개소)

ㅇ 변경내역 : 수량증가에 따른 계약기간 및 계약금액 증가

- 계약기간 변경 : (당초) ’23.4.19.~’23.11.15. → (변경) ’23.4.19.~’23.11.30.

- 계약금액 증가 : (당초) 1,430,000천원 → (변경) 1,730,000천원 (증 300,000천원)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 예산조치 : 사회재난(지반침하) 사전 예방을 위해 재난관리기금(300,000천원) 활용

****************************

□ 조치계획

ㅇ 변경사항과 같이 계약기간 및 금액을 변경하여 공동조사용역을 수행하고자 함

- 계약상대자와 상호 협의하에 긴급조사 구간에 대하여 설계변경 시행전 우선 시행

□ 행정사항

ㅇ ’23.10. : 설계변경 의뢰(도로관리과→재무과)

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 침하우려구간 긴급 공동조사 현황 1부.