문서번호	방재시설부-12355
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	10/16
			이동훈
협 조
	주무관			김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역 -

설계변경[전체7회, 6차 1회] 검토 보고

2023. 10.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역 -

설계변경(전체7회, 6차1회) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역」관련 건설사업관리 물가변동(ES) 반영 및 배치기간/투입비 정산에 따른 설계변경 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2023-6665호(2023.10.13.)

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 위    치 : 서울시 양천구 신월IC ~ 화곡지하차도 BOX 시점

ㅇ 용역내용 : 당해 건설공사 전반에 대한 건설사업관리용역

ㅇ 용역기간 : 총차 ‘16.10.04.~‘25.01.31.(6차 : ‘22.12.08~‘23.10.26)

ㅇ 용 역 비 : 7,132백만원 (6차 : 1,000백만원)

ㅇ 용 역 사 : ㈜이산 외 3개사

2		보고내용

ㅇ 설계변경 사유

- 총차(7회) : 물가변동에 따른 계약금액 조정 반영

- 6차(1회) : 물가변동에 따른 계약금액 조정 반영 및 건설사업관리기술인 투입계획 변경에 따른 배치기간 연장/투입비 정산

ㅇ 설계변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총차	용역기간	2016. 10. 04. ~ 2025.01.31.	2016. 10. 04. ~ 2025. 01. 31.	-
	용역금액	7,132,400,000원	7,300,600,000원	증) 168,200,000원
6차	용역기간	2022. 12. 08. ~ 2023. 10. 26.	2022. 12. 08. ~ 2023. 12. 06.	증) 1.32개월
	용역금액	1,000,000,000원	1,000,000,000원	-

ㅇ 총차 변경 현황

- 물가변동(ES반영)

구 분	전체분			비고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 용역비	7,132,400,000원	7,300,600,000원	증) 168,200,000원
- 물가변동비	-	168,200,000원	증) 168,200,000원
2. 용역기간	‘16.10.04~’25.01.31 (99.9개월)	‘16.10.04~’25.01.31 (99.9개월)	-

ㅇ 6차분 변경 현황

- 물가변동(ES반영) 및 용역기간 변경

구 분	6차분			비고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 용역비	1,000,000,000원	1,000,000,000원	-
- 물가변동비	-	45,862,600원	증) 45,862,600원
- 배치기간/투입비 정산	-	(45,862,600원)	감) 45,862,600원
2. 용역기간	‘22.12.08~’23.10.26	‘22.12.08~’23.12.06	증) 1.32개월

- 건설사업관리기술인 투입계획 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
특급기술인(책임)	10.50개월	11.82개월	증) 1.32개월
고급기술인(토목)	10.50개월	11.82개월	증) 1.32개월
고급기술인(안전)	10.50개월	11.82개월	증) 1.32개월
중급기술인(토목)	10.50개월	11.82개월	증) 1.32개월
기술지원기술인	10.50개월	11.82개월	증) 1.32개월

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 물가변동(ES반영)에 의한 계약금액 조정 및 건설사업관리기술인 투입계획 변경에 따른 용역기간 변경사항임

4		보고자 의견

ㅇ 건설사업관리용역 총차 물가변동을 반영하고 6차분 용역기간 변경에 따른 건설사업관리기술인 실투입일을 변경(배치기간 연장/투입비 정산)한 내용은 적정하다고 판단되는 바, 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 변경계약 설계서 1부.  끝.