문서번호	급수운영과-17917
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
반건모	전동근	10/17
		代신중선
협 조

현장 실정 검토보고-2차

(2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고-2차

(2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

"2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사"와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장실정 보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

※관련문서: 서울시설공단 공사감독2처-12444(2023.10.12.)호

Ⅰ		현 황

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023.04.13. ~ 2023.11.11.

ㅇ 도 급 비: ************

ㅇ 시공내용: *******************

ㅇ 도 급 자: ***************

ㅇ 발 주 처: 강남수도사업소(급수운영과)

Ⅱ		공단 요청내용

□ 사토장 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 수도권 매립지로 반입하도록 설계되었으나, 토사 반입기준 및 방법 변경으로 사토장 변경이 필요한 실정임

※관련문서: 급수운영과-15826(23.09.12.)호

ㅇ 변경 사토장 현황

****************************

*************************************

ㅇ 운반거리 및 운반속도 산출

ㅇ 사토장 변경에 따른 운반단가

구분	당초	규격	단가(원)	적용단가
**	**** **********	**** ***************	******	****** *********
**		**** *************	******

ㅇ 공단 검토의견

- 변경 사토장 확인결과 충분한 부지면적을 확보하고 있으며 진입로, 토사반입동의서 등 사토장으로 사용하기에 적합하다고 판단되며

- 운반거리, 운반속도 등 단가산출은 적절하게 산출되었고 계약단가와 동일하므로 공사비 변동은 없음

□ 3구간 주간→야간 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 3구간은 전체 주간작업으로 설계되었으나, 현장 확인결과 3구간 종점부(*****************) 주변 영업점의 민원 발생으로 주간작업이 어려운 실정임

위치도	현장사진(역삼동 673-39)

ㅇ 공단 검토의견

- 현장 확인결과 종점부 약 78m 구간 인근에 다수의 음식점들과 주차장이 있어 주간 작업 시 민원 발생의 우려가 있으며

- 종점부 사거리 맞이음 작업 시 단수구간이 광범위 하여 주간 작업이 어려운 실정임

- 따라서 시공사에서 요청한 3구간 종점부 78m(역삼동 673-23~39)의 작업을 야간으로 변경하여 진행하는 것이 타당하다 판단됨

※주간 → 야간 변경 시 도급비 약 13,491천원 증가

Ⅲ		사업소 검토의견

□ 사토장 변경

ㅇ 서울시설공단의 검토의견 대로 운반거리 및 속도, 사토장 면적 등 적절하므로 변경함이 타당하다 판단됨

□ 주간→야간 변경

ㅇ 서울시설공단의 검토의견 대로 현장 여건이 주간공사를 시행하기 어려운 상황이므로 야간공사로 변경함이 타당하다 판단됨

Ⅳ		행 정 사 항

□ 서울시설공단에 회신

ㅇ 상기 검토의견과 같이 변경사항에 대해 타당하다 판단되므로 향후 설계변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신코자 함.

붙임: 1. 현장실정 검토보고 관련 공문(서울시설공단) 1부.

2. 현장실정보고(시공사) 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.