문서번호	시설관리과-23954
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
임상근	代유형근	이동욱		10/17
				장화영
협 조
	주무관		이승환

(2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사)

준공기한 연기 검토 보고

2023. 10. 17. (화)

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

준공기한 연기 검토 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장 : 이유찬☎2191 담당 : 임상근☎2198

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 준공기한 연기 보고서에 대한 검토 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-12693(2023. 10. 17.)호

- 준공기한 연기 검토보고서 제출

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사위치: 효자동 외 9개동

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2023. 10. 20.

ㅇ 계약금액: 490,210,080원

ㅇ 공사개요: 상수관로 부설 D= 100~300mm, L= 1,000m

ㅇ 계 약 자: (주)화랑건설  대표 박순임

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 강진혁

□ 공사진행 현황

ㅇ 공 정 율: 95% (2023. 10. 17. 현재)  ※ 타절 구간 포함

ㅇ 완료공정

- 직관(약 400m) 부설 완료 [(1, 3, 6, 10구간(대체구간)]

- 4, 5, 7, 8, 9구간 타절 협의 (굴착 통제, 사유지, 지장물 과다 매설 등)

ㅇ 잔여공정

- 2구간(대체구간) 진행 중 (성북구 장위동 / D= 200mm, L= 100m)

□ 준공기한 연기요청

ㅇ 시공사 준공기한 연기 요청사유

- 추가 대체구간 공사 시행에 필요한 절대공기 증가: 11일 (붙임 연기원 첨부)

※ 도로굴착 협의, 밸브실 점검, 기타 현장조사 등

- 준비 및 정리기간 추가: 45일 (붙임 연기원 첨부)

ㅇ 준공기한 연기요청일: 총 56일

- 당 초: 2023년 4월 24일 ~ 2023년 10월 20일

- 변 경: 2023년 4월 24일 ~ 2023년 12월 15일

□ 검토의견

ㅇ 서울시설공단 검토사항

1) 설계 공사기간 검토

- 설계 시 공사기간 중 준비기간(15일), 정리기간(15일)로 각각 반영하였으나,

- "적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인" 지침에 따르면 준비기간(60일),  정리기간(30일) 이내로 규정할 수 있으므로 이에 준용하여 범위 안에서 연기 검토

2) 준공기한 연기사유 검토

- 시공사 반영 의견에 따라 추가 대체구간 준비를 위한 절대적인 공기 증가, 준비 및 정리기간 추가의 사유로 연기 사유 타당함.

ㅇ 사업소 검토사항

- 2, 10구간 타절로 인해 대체구간 실착공 준비에 절대적인 시간이 소요된 점,

"적정 공사기간 확보 가이드라인"에 제시된 준비기간 및 정리기간에 비해 설계 시반영된 기간이 (실제 현장에 적용하기에는) 다소 공기가 부족할 수 있다는 점,  또한 여름철 장기간 다발적 우기로 인해 실질적으로 공사가 장기간 중단된 점을 고려하여 공단에서 제출한 연기 사유가 적정하다고 판단됨.

ㅇ 준공기한 연기내용

- 연기사유: 절대공기 부족 등 (총 56일)

- 당    초: 2023년 4월 24일 ~ 2023년 10월 20일

- 변    경: 2023년 4월 24일 ~ 2023년 12월 15일

ㅇ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 조치계획

ㅇ 검토결과 준공기한 연기 사유가 타당하므로 준공기한 변경 시행하고 그 결과를 공단으로 회신하고자 함.

붙임  준공기한 연기요청 관련서류 1부.  끝.