문서번호	도로보수과-11018
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
심영우		안동국	10/17
			이경우
협 조

「2023년 서부간선도로 노들로 접속부 옹벽 정밀안전점검 용역」

용역준공 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

강서도로사업소

(도로보수과)

「2023년 서부간선도로 노들로 접속부 옹벽 정밀안전점검 용역」

용역준공 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인「2023년 서부간선도로 노들로 접속부 옹벽 정밀안전점검 용역」과 관련하여 현장여건 반영 등으로 인한 계약물량 변경 검토 보고임.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 2023년 서부간선도로 노들로 접속부 옹벽 정밀안전점검 용역

○ 용역기간 : 2023. 7. 25. ~ 2023. 10. 23.

○ 용 역 비 : 금14,410,000원

○ 도 급 자 : ㈜중앙종합안전기술연구원 대표 장은환

Ⅱ		보고내용

가. 용역비 증감내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
1. 직접인건비		4,400,195	4,400,195	증) 0
2. 제경비		4,840,214	4,840,214	증) 0
3. 기술료		1,648,081	1,498,081	감) 150,000
4. 직접경비		1,444,708	1,444,708	증) 0
5. 선택과업비		579,235	729,235	증) 150,000
	1) 점검장비	579,235	579,235	증) 0
	2) 진단용균열폭 측정기	-	36,000	증) 36,000
	3) 진단용 해머 드릴	-	36,000	증) 36,000
	4) 안전진단 및 점검용 조끼	-	39,000	증) 39,000
	5) 투습방지용 안전모	-	39,000	증) 39,000
6. 안전시설비		43,102	43,102	증) 0
7. 자문회의비		150,000	-	감) 150,000
공급가액		13,100,000	12,950,000	감) 150,000
부가가치세		1,310,000	1,295,000	감) 15,000
총 용역비		14,410,000	14,245,000	감) 165,000

※ 변동내용 : 자문회의비, 특수장비 사용

나. 기타사항 : 특수(허)장비 사용

진단용 균열폭 측정기	진단용 해머 드릴
안전진단 및 점검용 조끼	투습방지용 안전모

Ⅲ		검토의견

○ 상기내용은 시설물의 현지 여건을 감안한 변경사항으로 타당한 것으로 판단되어 보고내용과 같이 계약금액을 조정하고자 함.

붙임  1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.