문서번호	기반시설과-2966
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정영환		이석근	10/18
			이유국
협 조
	주무관			代장은석

'23년 한강공원 화장실 신설 발주

2023. 10.

미래한강본부

(기반시설과)

'23년 한강공원 화장실 신설 발주

’23년 한강공원 신설 화장실 실시설계가 완료됨에 따라 화장실 구매, 기반시설 및 부상형 부력체 설치 공사를 발주하고자 함

□ 관련근거

○ '23년 한강공원 화장실 신규설치 추진계획(본부장 방침, 환경수질과-1201, '23.02.17)

- 신설 화장실 : 14동(이동형 11동, 부상형 3동 등 9개 한강공원)

○ '23년 한강공원 화장실 변경 추진 계획(본부장 방침, 환경수질과-3366, '23.10.13)

- 신설 화장실 : 7동(이동형 4동, 부상형 3동 등 5개 한강공원)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 이동형 및 부상형 화장실 7동 신설

- 이동형 화장실 : 4동(광나루2, 잠원 1, 여의도 1)

- 부상형 화장실 : 3동(반포 2, 양화 1)

※ 유형별 화장실 내역

연 번	공원명	설 치 위 치	형 식	화장실 유형	비고
계		7동	이동식 11동, 부상형 3동 (여성전용 3실, 가족형 5실 포함)
1	광나루	어린이놀이터 앞	이동식	여성전용+가족화장실
2		성내천 합수부	이동식	남·여·장애인
3	잠 원	안내센터 앞	이동식	남·여+가족화장실
4	반 포	반포대교 밑 달빛광장	부상형	남·여+가족화장실
5		반포나들목 자전거공방	부상형	남·여+가족화장실
6	양 화	당산육갑문 앞	부상형	남·여·장애인
7	여의도	3호 매점 앞	이동식	여성전용+가족화장실

○ 사업예산 : 2,483백만원

- 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 둔치 및 화장실 청소, 시설비

□ 그동안 추진경위

○ ’23. 02. 07.        화장실 신설 대상 선정 추진 방침(환경수질과-1201)

○ ’23. 03. ~  09.    실시설계 용역 추진 및 준공

○ ’23. 06.            부상형 특허공법 선정 및 협약 체결

○ ’23. 10. 13.        화장실 신설 대상지 변경 방침(환경수질과-3366)

□ 발주 계획

○ 발주 방법 : 관급 및 공사 종별 등 분리 발주

○ 발주금액 : 2,380,649천원

구분	공 사 명		발주금액	계약방법	주요내역
구매및발주	발 주 금 액(계)		***********
	화장실 구매	본체(7동)	*********	**** *******	- 화장실 본체 7동 - 냉난방기 16대
		냉난방기	********	****
	기반시설공사	도급비	*********	****	- 수도배관 연장 매설 - 오수관로 연장 매설 장애인 진출입 슬로프 및 데크 등 설치
		관급비	********
	부력체 설치 공사	도급비	*********	****	- 부력체 7대 제작․설치 - 기초 콘크리트 공사 등
		관급비	********
	전기공사	도급비	********	****	인입전력 신설 및 배선 매립
		관급비	*******
	재해예방 기술지도용역	기반시설	*******	****	공사별 재해예방 지도
		부력체 설치	*******
		전기공사	*******
이전비		기반시설공사	********	********	- 수목 등 지장물 이전 - 매설 시설 등 복구
		부력체 설치공사	********

○ 관급 물품 및 자재 구매 발주

********************************

*****************

- 공사별 기초공사용 레미콘 및 용봉강 등 품목별 조달구매 의뢰

○ 공사 발주

- 화장실 기반시설공사 발주

******************

*************

- 화장실 부력체 제작 설치 공사 발주

*****************

************

·계약사유 : 한강 둔치에는 침수시 자연 부상 부력체(특허공법)이 필요하나 현재 ㈜아이랜드만 보유하고 있고, 특허공법 선정심사위원회(‘23.6.15.)를 통해 선정 후 협약을 체결함

- 화장실 전기공사 발주

****************

******************

·계약사유 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』

제25조제1항5호가목(추정가격 1억6천만원 이하)에 의거 소액 계약

○ 재해예방 기술지도 용역 발주(3건)

*******************

*************

- 계약사유 : 지방계약법 시행령 제25조5호나목(추정가격 2천만원 이하)에 의거 소액 용역 계약으로 낮은 견적을 제시한 업체 선정

○ 산출 공사비 : 붙임 실시설계 내역서 참조

□ 향후 계획

○ 공사 계약심사(‛23. 10. 20. ~ 11. 07.) : 계약심사과, 공공감사담당관

- 화장실 기반시설공사 및 부력체 설치공사 계약심사

- 화장실 부력체 설치 공사 일상감사 의뢰

○ 공사 발주 의뢰(‛23. 11. 08. ~ ) : 서울시 재무과 계약

- 화장실 기반시설공사 및 부력체 설치 공사 발주 의뢰

○ 조달구매 의뢰(‛23. 10. 20 ~ 11. 10.) : 미래한강본부 총무과

- 화장실 본체 및 냉난방기 구매

- 공사 자재(레미콘 및 용봉강 등)

- 전기 분전반 등

붙임  1. 설계내역서 각 1부.

2. 방침서(본부장, 환경수질과) 각  1부.