문서번호	뷰티패션산업과-10838
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		뷰티패션정책팀장	뷰티패션산업과장
김경환		승효선	10/17
			권소현
협조

준공기한 연기 보고
(서울뷰티허브 조성 설계용역)

2023. 10.

뷰티패션산업과

「서울뷰티허브 조성 설계용역」

준공기한 연기 보고

「서울뷰티허브 조성 용역」시행사로부터 접수된 계약연장 신청 건에 대하여 다음과 같이 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울뷰티허브 조성 설계용역

○ 계 약 자 : ************

○ 계약금액 : ****************************

○ 계 약 일 : *************

○ 착 수 일 : *************

○ 준 공 일 : *************

□ 보고내용

○ 관련문서 : *************************************

○ 준공기한 변경 사항

	당 초	변 경	비 고
계약기간	**********************	********************	****

○ 연기사유

- ***********************************

○ 검토의견

- **************************************************************************************

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ′23. 10. 20. : 용역 중간보고

○ ′23. 10. 23. ~ 11. 9. : 실시설계 (※ 최종보고일 : 10. 27.)

○ ′23. 11. 13. : 용역 준공

붙임  계약연장 신청 문서 1부.  끝.