아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역)

우리 본부에서 시행 중인 "올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역"과 관련하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명: 올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역

2. 계약업체: ***********************************

3. 계약금액:**************

4. 계약기간: 2023. 5. 22.~ 2024. 12. 20.

5. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증⋅감	비 고
용 역 비 (원)		***********	***********	*
건설페기물 운 반(㎥)	계	*****	*****	*******
	폐콘크리트	***	***	*******
	폐아스팔트	*****	*****	*******
	혼합폐기물	*	***	*******
건설폐기물 처 리(ton)	계	*****	*****	*******
	폐콘크리트	***	***	*******
	폐아스팔트	*****	*****	*******
	혼합폐기물	*	***	*******

※ ① 방침서(시설건설과-9939, '23. 10. 16.)에 기재된 혼합폐기물 증·감 내역 수정[(감) 318 → (증) 184)]

②  본 건 물량은 공사전 추정물량으로 공사시 터파기 등을 하여 실제 물량 확인 후 정산

6. 설계변경 사유

· 대상 공사(올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사) 현장실정보고(1~3차)에 따른 건설폐기물 운반 및 처리 물량 증감

7. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비(시설비)

붙임 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 현장실정보고에 따른 검토결과 보고 3부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	박윤선		시설건설과장	이승우		시설부장	10/18
전태호
협조자	주무관	최승영
시행	시설건설과-10002	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1494	/전송	02-3146-1529	/	seathink@seoul.go.kr	/	부분공개(5)