아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(난지물재생센터 총인처리시설 설치사업 휴일작업 계획 승인 통보[2023.10.21.(토)~10.22.(일)])

1.업무지시현장 : 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(장기-1차) 주식회사 삼안

2.작 성 일 자 : 2023-10-19 09:10:06

3.지 시 내 용

가. 난지총인 제2023-709(2023.10.17.)호, 『휴일작업(2023.10.21.(토)~2023.10.22.(일)) 계획 승인 요청』 관련

나. 그간 우천 등으로 공정이 다소 지연된 바 후속공정들을 감안하여 건설기술진흥법 제65조의2 및 같은법시행령 제103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외)제2호에 따라, 휴일공사를 승인하오니 근로자의 피로 누적으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 작업 전·중·후 건강상태를 체크하시기 바라며, 공사장 안전관리에도 최선을 다하시기 바랍니다.

작업일자	작업내용	근무자
		시공사	건설사업관리단
**************	**************************	**** ***	***
**************	**********************	**** ***	***

다. 기타 지시사항

○ 서울특별시 '건설공사장 중점관리 20대 항목 및 건설기계 10대 안전수칙' 준수

○ 자재양중 시 충돌주의 및 작업, 보행 중 휴대폰 사용금지

○ 작업통로 확보 및 작업장 내·외부 정리정돈 철저.  끝.

주무관	서인철		문화시설과장	代김동석		건축부장	전결 10/19
이형재
협조자
시행	건축부-17080	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2231	/전송	02-6438-2299	/	sic2007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)