문서번호	급수운영과-17117
보존기간
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성현	양재덕	10/19
		이규희

『2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사』

단수 계획 보고

(2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 10.

강동수도사업소

급수운영과

단수 계획 보고

『2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사』중 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 수질사고를 미연에 방지하기 위하여 단수계획을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 29.

ㅇ 계약금액: ***********원

ㅇ 공사개요: D=100~300mm, L=1,330m 등

ㅇ 도 급 자: ****************

ㅇ 관련문서: 공사감독2처-12677(2023. 10. 17.)호

Ⅱ		단수 및 홍보 계획

□ 단수개요

연번	단수 위치	작업내용	단수예정일	단수시간	단수세대	작업일수
1	가락동 124	연결	2023.10.26	22:00 ~ 04:00 중 2시간	약5세대	1일
2	가락동 121	연결	2023.10.27	22:00 ~ 04:00 중 2시간	약40세대	1일
3	가락동 124-7	연결	2023.10.30	22:00 ~ 04:00 중 2시간	-	1일
4	가락동 125-9	연결	2023.10.31	22:00 ~ 04:00 중 2시간	약10세대	1일
5	가락동 125-6	연결	2023.11.01	22:00 ~ 04:00 중 2시간	-	1일
6	가락동 125-6	연결	2023.11.02	22:00 ~ 04:00 중 2시간	-	1일

ㅇ 단수 사유: 분기부 연결 작업

ㅇ 단수 위치 및 안내문: 붙임 참고

□ 홍보계획

ㅇ 단수안내문 배포 및 부착(시공사 명림건설(주) 박선민)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2일 전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

ㅇ 홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

- 강동수도사업소 홈페이지 단수안내

ㅇ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

ㅇ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(시공사 명림건설(주) 박선민)

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

ㅇ 급수차지원

- 단수지역 주민이 급수차 지원 요청 시 강동수도사업소 보유 급수차로
수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사(현장사무실)	*******	***********
현장 소장	*****	*************
감 독 자	*****	*************
발주청 담당	*****	************

붙임  단수계획서 및 단수안내문 각 1부.  끝.