아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]노들남북 고가차도 철거 잠정중단 사태

안녕하십니까? 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231015900160, 국민신문고번호: 1AA-2310********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 노들고가 철거공사 중지사유에 관한 것으로 이해됩니다. 아시는 바와 같이 당초 '22.1월 노들고가 철거에 따른 공사중 교통처리 대책 마련을 위해 6개월가량 착공을 연기한 바 있고, 이 기간동안 교통영향을 재분석한 결과 노들고가 철거시 교통체증이 당초보다 상당히 악화될 우려가 있는 것으로 검토되어 불가피하게 공사중지상태를 연장한 상황입니다.

이는 당초('16년) 교통영향 분석시와는 달리 노들섬 종합계획 수립, 용산국제업무지구 추진, 노들로 일반도로화 조성 및 다수의 동작/영등포구 재개발사업 추진 등 주변 여건들이 많이 달라졌기 때문인 것으로 판단됩니다.

'24년 상반기에 교통영향을 재분석하여 고가차도 철거를 검토 할 예정임을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 재난안전관리실 도로계획과 주명수 주무관(☎ 02-2133-8087)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	주명수		도로공간계획팀장	백대열		도로계획과장	10/19
전기현
협조자
시행	도로계획과-4951	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	jms0920@seoul.go.kr	/	부분공개(6)