아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	현장실정보고(4차) 회신(가락공동구 대체관로 구축공사)

1. 공사감독2처-12519(2023. 10. 13.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는『가락공동구 대체관로 구축공사』의 실정보고(4차)에 대하여 우리 사업소 검토 의견을 아래와 같이 회신하오니, 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

연번	실 정 보 고 내 용	회 신 내 용
1	○ 시험굴착 개소 증가 - 당초7개소→14개소 증가 ※현장과 GIS 상이로 누락된 기존관 발견, 지장물로 인한 선형변경	- GIS와 현장간 상이로 인해 관로 선형등 신설관 부설을 위한 시험굴착개소 증가를 설계변경시 반영토록하고, 횡단굴착 5) 굴착하단폭을 6,140㎜ 에서 5,900㎜ 반영(기울기1:0.1 미적용)한 토공 물량을 적용. ※ 개략공사비: 당초)11,833천원 변경)11,827천원 첨부문서 참조

붙임  실정보고검토 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	10/19
이규희
협조자
시행	급수운영과-17136	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)