아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공사 연기 승인 통보

1. 목양건설(주) 2023-010호(2023.10.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사로부터 공사 연기 요청한 사항에 대하여 아래와 같이 공사 연기 승인 통보 하오니 작업기간 내 공사완료 하시고 완료 보고서를 우리사업소로 제출하시기 바랍니다.

가. 연기요청 사유 : 공사 위치 주변 상인들의 추석 명절 이후로 단수 일정 조정 요청

나. 공사 연기 승인 내역

작업지시번호	작업기간		비 고
	당초	변경
3차	'23.9.21~'23.10.20.	'23.10.20~'23.11.20.

마. 시공업체 :****************

바. 관리업체 : **************************

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	목양건설(주) 대표 김영권, (주)홍익기술단 대표 성낙전
주무관	노병권		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	10/19
代이연창
협조자
시행	급수운영과-18452	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 서울특별시 강서수도사업소(급수운영과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3956	/전송	02-3146-3989	/	qute9280@seoul.go.kr	/	부분공개(6)