문서번호	기전과-12484
결재일자	2023. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이동열		정영술	10/20
			최경주
협 조

「지하차도(성산, 증산, 의주로) 진입차단시설 감시용 CCTV 구매」 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「지하차도(성산, 증산, 의주로) 진입차단시설 감시용 CCTV 구매」 추진계획

지하차도 진입차단 시설의 정상작동 여부를 확인하기 위해 CCTV를 구매하여 시설물의 상시 감시에 만전을 기하고자 함.

□ 추진 경위

○ 지하차도 풍수해 재난대응 강화대책(도로시설과-1833, 23. 8. 3.)

○ 2021. ~ 2022. : 성산, 증산, 의주로 진입차단시설 설치 완료

□ 설치대상

구분	도로형태	연장/박스길이	차단시설	설치연도
성산지하차도	3/0 차선	377/110	문주형	2021. 12.
증산지하차도	3/3 차선	575/221	문주형(상행), 편주형(하행)	2022. 7.
의주로지하차도	2/0 차선	250/70	편주형	2022. 5.

□ 추진계획

○ 사업위치 : 성산, 증산, 의주로 지하차도의 진입차단시설

○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 11.

○ 사업내용 : 지하차도 진입차단 시설 감시용 CCTV 설치

○ 소요예산 : 38,587천원

- 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비

○ 계약방법: 조달구매(제3자단가계약)

※ 관련법령 : 조당사업에 관한 법률 제12조

○ 계약업체

- 영상감시장치 : (주)포딕스시스템

- 네트워크스위치 : 솔텍인포넷(주)

- 선정사유 : 현장에 기 설치된 시스템과 호환이 용이하고, 가격이 합리적인 제품 선정 ※산출내역서 첨부

□ 사전심의 검토

○ 특정제품 선정심사 : 해당없음

- 물품제조·구매 사업의 경우 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가 2천만원 미만

○ 계약심사 : 해당없음

- 조달발주 사업 제외

○ 일상감사 : 해당없음

- 추정가격 5억원 미만인 물품 제조·구매 제외(조달 발주 제외)

○ 사전규격 공개 : 해당없음

- 추정가격 5천만원 이상 물품 및 용역 입찰계약에 해당 안됨.

□ 추진일정

○ 2023. 10. : 예산 재배정 요청(도로시설과)

○ 2023. 10. : 조달구매의뢰(관리단속과)

○ 2023. 11. : 납품완료

붙임  산출내역서 1부.  끝.