문서번호	건축부-17145
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김동석		代김동석	10/19
			이형재
협조

『서울 어울림체육센터 건립공사』

1차수 준공 정산으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

2023.  10. 19. (목)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

1차수 준공 정산으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』1차수 준공 정산으로 인한 계약금액 조정 검토 보고가 책임건설사업관리기술인으로부터 제출되어 적정여부를 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ ****************************************

ㅇ 공사기간: '22. 7. 25.~'25. 7. 7. (35개월)

(1차: '22. 7. 25.~'23. 9. 18.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 28.5%

□ 추진경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ '22. 7. 29.   : 공사 계약

ㅇ '22. 7. 25.   : 공사 착공(건축, 토목, 조경)

ㅇ '23. 7. 27.   : 제1회 설계변경자문 소위원회 개최(조건부 가결)

ㅇ '23. 8. 18.   : 제1회 물가변동 외부전문가 자문 시행(적정)

ㅇ '23. 8. 24.   : 제2회 설계변경자문 소위원회 개최(조건부 가결)

ㅇ '23. 10. 현재  : 토목 토공사(토사반출 및 가시설 설치) 중

□ 준공 정산 내용

ㅇ 관련근거 등

-『1차준공 간접비(보험료) 정산에 따른 공사계약 변경요청』토문 제2023-1818호(2023. 10. 19.)

-『1차 준공검사 결과보고』토문 제2023-1818호(2023. 10. 19.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

-『장기1차 준공에 따른 공사 계약 변경요청의 건』코원어울림-제2023-10-13호(2023. 10. 18.)

*******

***************************

***********************

***********

****	****	****	*******	**
**	***************	***************	****
***	**************	**************	*********************

ㅇ 공사기간 변경: 변동 없음

ㅇ 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 관광체육국 체육정책과)

ㅇ 책임건설사업관리기술인 검토 의견

*******************************************************************

□ 처리의견

ㅇ 건설사업관리용역사업자의 검토 의견이 적정하여 준공 정산으로 인한 계약금액 조정을 시행하고자 함.

붙임: 1. 1차수 준공 간접비 정산에 따른 공사계약 변경요청 1부.

2. 설계변경 내역서(1차수) 1부.  끝.