급수공사 연기 보고서(신설-77)

시    행

급수운영과-17329

시행일자

2023. 10. 23.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

부분공개(6)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국		양재덕	10/23
			이규희
협 조

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공　사　명: 2023년 마천동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 주식회사웅진건설산업 대표 유기정

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	**********	신설-77	2023.10.10.~ 2023.10.17.	2023.10.17.~ 2023.11.30.

○ 연기사유

- 수요가 자재 반입 일정 및 시공일정 협의가 필요, 수요가 요청에 의한 연기신청

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기.

끝.