급수공사 연기 보고서(개량-38, 39)

시    행

급수운영과-17400

시행일자

2023. 10. 23.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

대시민공개

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
최박		김종섭	10/23
			이규희
협 조

명에 의거 풍납동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공사명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 계약상대자: 파워개발(주)  대표 박석흠

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	잠실동 213-6	개량-38	2023.10.17.~ 2023.10.27.	2023.10.17.~ 2023.11.25.
2	삼전동 133-15	개량-39	2023.10.20.~ 2023.10.24.	2023.10.20.~ 2023.11.25.

○ 연기사유

- 개량-38, 39: 작업시 수요가에서 입회 요청하여 일정 협의 중으로 공사 연기신청함.

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기하고자 함.

붙임  급수공사 연기원 1부.  끝.