문서번호	치수과-16786
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
이은찬		오상호		민병기		10/23
						신용철
협조

공사 현안사항 검토보고[2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

[2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

공사 현안사항 검토보고

2023.10.

(안전건설교통국 치수과)

공사 현안사항 검토보고

집중호우 대비 저지대지역 침수예방과 하수악취 민원해소 등을 위해재배정된 긴급준설비 및 집행잔액의 활용계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정(市 물재생계획과-12508, `23. 8.25)

- 가을철 집중호우 대비 저지대 침수취약지역 하수관로 준설***********

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정(市 물재생계획과-15078, `23.10.16)

- 가을철 낙엽으로 인한 빗물받이 배수불량 및 하수악취 민원 해소***********

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 기    간 : 2023. 2.28. ~ 12.31.

○ 내    용 : ********************************

○ 도 급 비 : **************

○ 시 공 사 : 현준종합건설(주) 대표 임혜진

□ 추진경과

○ 2023. 2.28.     공사계약 및 착공

○ 2023. 4. 3.     설계변경(1회)

- 여름철 집중호우 대비 빗물펌프장 및 하천준설

○ 2023. 6. 9.     설계변경(2회)

- 마장축산물시장 일대 집중 준설(물청소) 및 유수지 악취저감 사업

○ 2023. 9.15.     설계변경(3회) … 공정율 91%

- 장마종료 및 2차 우기 대비 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 등 준설

□ 추진계획(예산활용방안)

○ 긴급준설비 재배정예산 활용방안 … *********

- 집중호우 대비 저지대 침수취약지역 준설(3회차) … *********

·가을철 집중호우 대비 저지대지역(성수, 용답, 송정, 행당) 하수관로 준설 필요

- 하수악취 및 배수불량 민원처리 등 긴급준설 … ********

※ 긴급준설비 사용계획(******************************)

○ 공사 집행잔액 활용방안 … *********

- 추석 명절이후 마장축산물시장 일대의 하수도 사용량증가에 따른 배수불량 및 악취저감 해소를 위한 하수관로 물청소(3회차) 시행(부구청장 지시사항)

□ 조치계획

○ 작업지시(8~10차) 시행

-「2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」시공사에 우선 작업지시한 후, 추후 설계변경코자 함.

○ 공사비 변동내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	*************	*************	*************
도 급 비	*************	*************	*************
이 전 비	***********	***********	*************

※ 예산 부족 시 이전비 내에서 추가 사용 후, 추후 실물량 정산 추진

□ 향후계획

○ 2023.10.~11.    작업지시 시행

○ 2023.12.          설계변경(정산) 및 공사준공

붙임  1. 저지대 침수취약지역 준설구간 1부.

2. 마장축산물시장 일대 준설구간 1부.

3. 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림******** 1부.

4. 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림******** 1부.  끝.