문서번호	방재시설부-12722
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	10/23
			이동훈
협 조
	주무관			김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 중첩, 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 설계변경[총차 3회, 2차 1회] 검토 보고

2023. 10.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 중첩, 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 설계변경[총차 3회, 2차 1회] 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 중첩, 잔여구간 건설폐기물 처리용역(총차3회, 2차 1회」관련 설계변경 및 물량정산에 따른 조기준공에 대한 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2023-국회대로(건)-273호(2023.10.20.)

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 1단계(중첩,잔여구간) 건설폐기물 처리용역

ㅇ 위    치 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 중첩·잔여구간

ㅇ 용역기간 : '20.06.23.~'24.12.31.(2차 : ‘22.11.10~‘24.12.31)

ㅇ 용 역 비 : 금380,274,600원(일금삼억팔천이십칠만사천육백원정)
※ 2차 금199,567,600원

ㅇ 계 약 자 : 주식회사 건용환경개발

2		보고내용

ㅇ 설계변경(총차, 2차) 사유

- 설계물량이 최종 처리되어 조기 준공

- 금회(2차분)분은 물량대체 실정보고(방재시설부-10585(2023.9.4.)사항을 설계변경에 처리량 정산

ㅇ 계약기간 및 계약금액 조정

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
계약 기간	총차	2020. 06. 23. ~ 2024.12.31.	2020. 06. 23. ~ 2023. 11. 30.	감) 13개월	조기 준공
	2차	2022. 11. 10. ~ 2024.12.31.	2022. 11. 10. ~ 2023.11.30.	감) 13개월
계약 금액	총차	380,274,600원	380,274,600원	-	금액변경없음
	2차	199,567,600원	199,567,600원	-

ㅇ 수량 변경내용

구 분			변 경 현 황			비 고
			당초	변경	증 · 감
물량	총차	폐콘크리트	1,914ton	4,994ton	증) 3,080
		폐아스콘	9,740ton	6,808ton	감) 2,932
		혼합폐기물	21ton	0ton	감) 21
	2차	폐콘크리트	1,379ton	4,459ton	증) 3,080
		폐아스콘	4,728ton	1,796ton	감) 2,932
		혼합폐기물	21ton	0ton	감) 21

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 건설폐기물(폐콘크리트, 폐아스콘, 혼합폐기물) 처리물량에 대해 검토한 결과 적합한 것으로 사료됨

4		보고자 의견

ㅇ 지난 2023년 9월 실정보고한 사항의(금액 변경없이 폐기물을 형상에 따라 수량변경) 처리량 정산으로 처리물량 및 물량이 최종 처리되어 조기 준공코자 함은 적정하다고 판단되는 바, 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 건설폐기물 처리용역 설계변경(총차 3회, 2차 1회) 검토보고 1부.  끝.