문서번호	문화재관리과-14533
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한양도성관리팀장	문화재관리과장
강남규		이승철	10/24
			김건태
협 조

『북한산성 보국문․대동문 해체보수공사』

설계변경(제2회, 정산) 검토보고

2023. 10.

문 화 본 부

(문화재관리과)

『북한산성 보국문․대동문 해체보수공사』

설계변경(제2회, 정산) 검토보고

문화재관리과장 :김건태☎2133-2650 한양도성관리팀장 : 이승철☎2659 담당 : 강남규☎2664

「북한산성 보국문․대동문 해체보수공사」와 관련, 감리원 및 시공사부터 제출된 설계변경 사항에 대해 문화재청 승인을 받고 계약변경하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 관련근거

ㅇ 북한산성 대성문 정비계획(문화재관리과-12897호, 2023.9.18.)

ㅇ 문화재청 설계변경 승인(문화재청 수리기술과-5255호, 2023.10.17.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 북한산성 보국문․대동문 해체보수공사

ㅇ 공 사 비 : *********************************

ㅇ 공사기간 : ’22. 5. 20. ~ ’23. 10. 31

ㅇ 시공자(문화재수리업자) :*******************

ㅇ 감리자(문화재감리업자) : *********

ㅇ 공사내용

- 보국문 : 성돌해체보수, 배수로, 위험수목정비, 등성계단 복원 등

- 대동문 : 초석위 문루 해체 후 재설치 등

□ 추진경위

ㅇ ’21. 11. 22. : 문화재 수리 설계승인 통보

ㅇ ’22.  5. 20. : 공사착공

ㅇ ’23.  8.  8. : 문화재청 제1회 설계변경 승인 통지(8.21 변경계약)

ㅇ ’23.  9. 18. : 북한산성 대성문 정비계획

☞ 대성문 기둥 1개소 긴급정비

ㅇ ’23. 10. 17. : 문화재청 제2회 설계변경 승인 통지

ㅇ ’23. 10월 현재 : 대동문 보국문 공사완료 및 대성문 추가공사 중

Ⅱ		설계변경 주요내용

□ 추가 공사 : 대성문 기둥 동바리 이음 보수

ㅇ 공사내용

- 기둥 동바리이음 : 지붕하중 지지를 위한 보강 가시설 설치, 기둥 보수

- 대성문 문루 방충방부 : 목부재 방충방부 약제처리 등

ㅇ 소요예산 및 주요변경 내용

내 용	금 액 (순공사비)	비고
*********	*********
*********	**********
****	*********
*****	*********
**	*********

□ 준공 정산 : 보험료 등 정산

ㅇ 준공정산 세부내용

- 국민건강 보험료, 국민연금 보험료, 노인장기요양 보험료 등 사후정산

(단위:원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 ·감	비고
****	**********	**********	*********
*****	**********	**********	*********
*****	*********	*********	*********
*******	**********	*********	************
*******	**********	*******	************
*********	*********	*******	***********
*******	**********	*********	***********
*******	**********	**********	***********
****	**********	**********	***********
*******	**********	*	************
**			************

※ 10월분 보험료(건강,연금)는 준공시 별도 정산

Ⅲ		처리 의견

□ 공사 설계변경 적정

ㅇ 감리자 의견 [*************]

- 발주부서 설계변경 요청사항에 따른 시공사 의견 검토 결과 타당함

ㅇ 문화재청의 설계변경 승인 받은 사항으로 계약금액 조정이 타당함.

□ 계약금액 조정

□ 설계변경 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	증 감
*****	***************	***************	*************

붙 임  1. 감리자 검토의견서  1부

2. 전문가 자문의견서 각 1부

3. 설계변경 도면 및 구조확인서

4. 내역서 및 산출서 1부. 각 1부.   끝.