문서번호	급수운영과-18430
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
손성우	신중선	박종일	10/24
			박기용

『2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』 공사구간 변경 검토 보고

『2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』

공사구간 변경 검토 보고

2023. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』

공사구간 변경 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인『2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』중 6구간(삼성동 128번지 ~ 128-22번지) 굴착 통제에 따른 공사시행에 어려움이 있어 대체구간 선정에 대하여 보고드림

☐ 공사 개요

○ 공 사 명: 2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2023.5.2. ~ 2023.11.30.

○ 공사개요: 장기사용 배급수관 정비(D100~D300㎜, L=1,202m)

○ 도 급 액: *************

○ 도 급 자: 대신건설주식회사(대표 ***)

○ 공사감독: 서울시설공단(공사감독2처 ***)

○ 공 정 률: 71% (862m/1,202m)

☐ 보고 내용

○ 6구간 강남구청 굴착통제로 시공 불가

- 설계당시 굴착 가능함으로 강남구청 도로관리과와 협의되었으나 2023년 하반기 강남구청 도로 정비사업으로 포장공사 진행하여 향후 3년간 굴착통제됨

○ 6구간 대체구간 선정 필요

- 6구간 개요: 삼성동 128 ~ 128-22번지 (D=150㎜, L=116m)

- 연간단가 진행 예정 장기사용 배급수관 및 지속적인 혼탁수 민원 발생 지역 중 대체구간 선정 필요

☐ 조치 방안

○ 대체 시공 구간 선정

- 논현동 181-7번지 ~ 182-31번지 구간으로 변경 시행

- 정비대상: ***********************

- 정비사유: 탁도 모니터링 시스템(논현초) 지속적 혼탁수 발생

- 정비계획: 주변 상수관망 고려하여 D150㎜ 구경확대하여 정비

- 연간단가 계획구간(논현동 181 ~ 181-14)과 연계하여 정비가능

○ 위치도

****

☐ 행정사항

○ 6구간 공사구간 변경 시공 지시 통보(사업소 → 서울시설공단)

- 당 초: 삼성동 128 ~ 128-22번지(D=150㎜, L=116m)

- 변 경: 논현동 181-7 ~ 182-31번지(D=150㎜, L=123m)

○ 도로굴착 허가 신청(강남구청 도로관리과 협의 완료)  끝.