문서번호	토목과-14220
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		보도관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
이범찬		김남천		代김경원		10/24
						신용철
협조

기성(제2회) 검사 결과보고(2023년 보도 유지보수공사(단가계약))

「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」 기성(제2회) 검사 결과보고

2023. 10. 24.(화)

안전건설교통국(토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

기성(제2회) 검사 결과보고

「2023년 보도 유지보수공사(단가계약)」와 관련 시공사에서 제출한 기성 검사원(제2회)에 대한 적정성 검토 보고임.

1		추진근거

○ 기성준공확인요청서(2차) 제출의 건(화신 제2310-12,‘23. 10.18.)

○ 검사원 지정요구 및 검사의뢰서(재무과-26161호,‘23. 7.17)

2		공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 보도 유지보수공사(단가계약)

○ 사업기간 :‘23. 3.14 ~ 12.31

○ 시 공 사 : 화신이앤씨(주) 대표 이명진

○ 도 급 비 : 1,503,308,700원

○ 사업개요 : 보도블록 포장 97.10a, 경계석 및 측구설치 L=3,800m 등

3		추진경과

○ ‘23. 3. 14. ~  3.17. …… 공사계약 및 착공

○ ‘23. 4.  7. ~ 10.13. …… 작업지시(1~8차)

○ ‘23. 7.  7. ………………… 설계변경(1회)

- 시비 재배정 사업 병행 및 현장여건에 따른 신규공종 반영 등

○ ‘23. 9. 27. ………………… 설계변경(2회)

- 타부서 공사 감독의뢰 및 추가경정 예산 반영 등

4		기성부분 검사

○ 개    요

- 기성기간 :‘23. 6. 30. ~ 9. 30.

- 작업규모 :‘붙임 2’기성내역(수량산출서)서 참조

- 검사내용 : 기성도서 및 제경비 적정성 / 시공물량 확인

- 검 사 자 : 보도관리팀장 김남천 / 입회자 토목팀장

○ 금    액

(단위 : 원)

계약금액	전회까지 기성금액	금 회 기성금액	누 계 기성금액	누계 기성율	잔여금액
1,503,308,700	445,830,000	532,950,000	978,780,000	65.10%	524,528,700

○ 검사결과 … 적합

- 기성부분 검사원(2회)의 작업물량 및 내역 등을 검토한 결과 공종별 작업이 적합하게 처리되어 기성부분 준공처리코자 함.

5		조치계획

○‘23. 10.25. …… 기성부분 검사(1회)조서 제출( → 재무과)

○‘22. 10.26. …… 기성금 지급( → 도급사)

붙임  1. 기성청구 관련서류 각 1부.

2. 기성내역서 1부.  끝.