문서번호	건축과-32407		주무관	공공건축1담당	건축과장		도시관리국장	부구청장
결재일자	2023. 10. 24.		오인택	손남기			代김영욱	전결 10/24
공개여부	부분공개(5,6)				고병연			신상철
방침번호	부구청장 제620호		협조
				문화체육과장		이용철
방침번호
				생활체육담당		이한주
				주무관		문지인

- 월곡 복합체육센터 신축공사 폐기물 처리용역 1차 -

제1차 설계변경 실정보고 검토

2023. 10.

건 축 과

(공공건축1팀)

- 월곡 복합체육센터 신축공사 폐기물 처리용역 1차 -

제1차 설계변경 실정보고 검토

현장 내 설계 상 포함 돼 있지 않은 매립 폐기물(폐토석) 발생에 대한 실정보고 검토임.

※ 조정(예상)금액: *************

1		용역개요

□ 용 역  명: 월곡 복합체육센터 신축공사 폐기물 처리용역

□ 위    치: 성북구 하월곡동 67-39 외 7필지

□ 대지면적: 2,190㎡

□ 건립규모: 지하3층 / 지상4층, 연면적 7,978.77㎡

□ 용역비: (1차) *********** [총차: ***********]

□ 사업(예정)기간: 2023. 8. 28. ~ 2024. 7. 22.

□ 사업주관부서: 문화체육과 생활체육팀

2		검토보고

□ 관련근거

○「(지방자치단체)공사계약일반조건」제6절 “1-가-1)”

○「서울특별시 공사계약특수조건」제12조 ①, ②

○ 제1차 설계변경 실정보고 검토 제출[월곡-10-02호 (’23. 10. 11.)]

□ 보고사유

○ 현장 내 설계상 포함 돼 있지 않은 매립 폐기물(폐토석) 발생으로 인한 계약 물량 변경.

○ 현장 내 설계 상 포함 돼 있지 않은 매립 폐기물(폐토석) 발생으로 인한 매립 폐기물 물량 증가.

3		주요변경사항

□ 설계변경사항

공 종	변경사항		비 고
	변경 전	변경 후
건설폐기물처리비	기존 건축물의 설계상 포함되지 않은 매립 폐기물 미존재로 인한 처리비 없음	현장 내 설계상 포함되지 않은 매립 폐기물(폐토석) 발생으로 인한 8,160ton 물량 상승
건설폐기물운반비	기존 건축물의 설계상 포함되지 않은 매립 폐기물 미존재로 인한 운반비 없음	현장 내 설계상 포함되지 않은 매립 폐기물(폐토석) 발생으로 인한 5,440㎥ 물량 상승

□ (예정)공사비 변경사항

○ 직접공사비 변경사항

품 목	규 격	단위	증감수량	재료비(원)	노무비(원)	경 비(원)	합 계(원)
폐기물 운반비	폐토석 (24T, L=28km)	㎥	5,440	0	0	**********	**********
폐기물 처리비	폐토석	ton	8,160	0	0	***********	***********
합 계				0	0	***********	***********

○ 공사원가 계산서 반영 사항(*************)

(단위: 원)

비 목		변 경 사 항		증/감
		변 경 전	변 경 후
재료비	직접재료비
	소 계
노무비	직접노무비	*********	**********	*	**********
	간접노무비
	소 계	*********	**********	*	**********
경 비	폐기물처리비	**********	***********	*	***********
	소 계	**********	***********	*	***********
계		**********	***********	*	***********
일반관리비		*******	*********	*	*********
이 윤		*******	*********	*	*********
공 급 가 액		**********	***********	*	***********
부가가치세		*********	**********	*	**********
예정공사비		**********	***********	*	***********

4		건설사업관리단 검토의견

□ 해당 실정보고를 검토한 결과 변경이 타당하다고 사료됨.

5		검토 및 처리의견

□ 현장 내 설계 상 포함되지 않은 매립 폐기물(폐토석) 추가 발생이 발견됨에 따라 매립 폐기물(폐토석) 추가 물량으로 반영하는 것이 적정함.

□ 이에 「공사계약일반조건」제6절 설계변경 요건 중 ‘설계서의 내용이 불분명한 경우 등’ 에 해당하고 예정공사비 산출에 대한 근거가 적정하므로 설계변경 승인하고자 함.

붙임 1. 기술검토보고 1부.

2. 실정보고 1부.

3. 공동 수급 협정서 1부.

4. 변경 내역서 1부.

5. 검증확인서 1부.  끝.