문서번호	교통운영과-15744
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
사재욱		박성수	10/24
			김상신
협조
	교통전문관		김상범

2023년 교통신호체계운영용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

교통운영과

(신호운영팀)

2023년 교통신호체계운영 용역 설계변경 검토보고

교통운영과장 :김상신☎2133-2450 신호운영팀장 :박성수☎2486 담당 :사재욱☎2477

2023년 교통신호체계운영 용역 진행 중 부처님 오신날, 10월 2일 등 대체휴일 확대에 따른 근무일수 변경으로 설계변경을 진행하고자 함.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명: 2023년 교통신호체계운영용역(강남권/강북권)

ㅇ 용역기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 계약금액: ******************************

ㅇ 계약업체: (강남권) 동림티엔에스 컨소시엄, (강북권) 도로교통공단 컨소시엄

□ 설계 변경 사유

ㅇ 대체휴일 확대(부처님 오신날, 10월 2일)에 따른 근무일수 조정

- (당초) 평일 248일 → (변경) 평일 246일(평일 2일 감소)

□ 설계변경(정산) 금액

(단위: 천원)

구 분	설계변경 금액(천원)
	당초	변경	증 감
강남권	*********	*********	********
강북권	*********	*********	********

□ 향후계획

ㅇ 2023. 10월 ~ 12월 : 계약변경 및 용역 준공 추진

붙임 : 설계변경관련 서류 각 1부.  끝.