문서번호	기전과-11487
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		채충일	10/25
			차창훈
협조

2023년 교통신호기신설 및 보수공사

5차작업지시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2023년 교통신호기 신설 및 보수공사』

제 5 차  작 업 지 시 계 획

2023년 교통신호기 신설 및 보수공사 제5차 작업지시를 아래와 같이 시행하여 교통신호기 신설 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		교통시설물 현황

구 분	신호제어기	신호지주	신호등	잔여시간표시기	음향신호기	비 고
영등포구 일부	**	***	*****	***	***	1구역
금 천 구	***	***	*****	***	***
동 작 구	***	***	*****	***	***	2구역
관 악 구	**7	*****	*****	***	***
서초구 일부	*20	*******	*****	***	****	제3구역
합 계	***	*****	*****	*****	*****

Ⅱ		사 업 개 요

사 업 명	2023년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)
구 역	제1구역	제2구역	제3구역
사업위치	***********	********	******
발주금액	************	************	************
계약금액	************	************	************
설계변경(1차)	************	************	************
설계변경(2차)	************	************	************
계약업체	*********	*******	************
계약기간	*******************	*******************	******************
책임감리원	*******		*******

Ⅲ		제5차 작업지시 계획

□ 작업지시차수: 제5차 작업지시

작 업 기 간: 2023. 10.25. ~ 11.30.

○ 1구역 작업지시내역(총 3건)

- 경찰청규제(2건)/ 일상보수(0건) 시행

구 분	작업내용	위 치	비 고
경찰청 규제	신호기 신설(차/보)등 2건	영등포구 도영로55 등 2개소

- 소 요 예 산: 33백만원

• 도   급   비: 33백만원

※ 1구역 5차 작업지시 세부내용은 붙임 참조

○ 2구역 작업지시내역(총 25건)

- 경찰청 요청(규제6), 일상보수(19건) 시행

구 분	작업내용	위 치	비 고
경찰청 규제	교통신호등 설치 등 6건	관악구 조원로 169 등 6개소
일 상 보 수	긴급출동 등 19건	신림교 입구 등 19개소

- 소 요 예 산: 197백만원

• 도   급   비: 163백만원

• 관급자재 구매:  54백만원

- 교통제어기 구매      : 1면×4,600,000원=4,600,000원

- 교통신호 지주 구매

디자인지주 150A 등 16본 ×2,500,000원= 40,000,000원

- 교통신호등 구매

차량신호등 1면3색 등  : 38개 × 256,000원=9,728,000원

※ 2구역 3차 작업지시 세부내용은 붙임 참조

○ 3구역 작업지시내역(총 35건)

- 경찰청 요청(규제11건), 일상보수(24건) 시행

구 분	작업내용	위 치	비 고
경찰청 규제	교통신호기 신설 등 11건	서초구 서초동1439-1 등 11개소
일 상 보 수	음향신호기 교체 등 24건	서초구 양재동105-4 등 24개소

- 소 요 예 산: 464백만원

• 도   급   비: 341백만원

• 관급자재 구매: 123백만원

- 교통제어기 구매      : 4면×4,600,000원= 18,400,000원

- 교통신호 지주 구매

디자인지주 200A 등 24본 ×3,600,000원= 86,400,000원

- 교통신호등 구매

차량신호등 1면2색 등 81개 ×  216,000원= 17,496,000원

※ 3구역 3차 작업지시 세부내용은 붙임 참조

□ 예산집행현황

(단위:원)

구 분	계약금액	작업지시금액			잔 액
		기 작업금액	금회 작업금액	계
1구역	572,162,450	520,390,000	33,121,500	553,511,500	18,650,950
2구역	421,334,340	258,238,200	162,844,000	421,082,200	252,140
3구역	726,734,120	368,368,000	341,288,000	709,656,000	17,078,120
합 계	1,720,230,910	1,146,996,200	537,253,500	1,684,249,700	35,981,210

Ⅳ		향 후 계 획

○ 책임감리원에게 위 사항에 대하여 작업지시하고,

○ 미래첨단교통과에서 추가 배정된 노후제어기 교체 예산(90백만원)으로 관급자재를 구매하여 2024년 교통신호기 공사 시 사용하고,

○ 작업기간 중 경찰청 규제 및 긴급민원 등 추후 변동사항 발생 시 추가 작업지시로 신속히 조치코자 함.

붙  임   1. 제5차 작업지시(제1,2,3구역) 각1부.  끝.