문서번호	한강문화관광과-2659
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	한강문화관광과장	한강사업총괄부장	한강사업추진단장		미래한강본부장
김세정	안신훈	윤석환	김용학		10/24
					주용태
협 조	총무과장			박서영
	기획예산과장			이강수

한강 역사문화홍보 전시관 설계 및 제작물 제작‧설치

용역 변경계약 검토

2023.10월

미 래 한 강 본 부

(한강문화관광과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

한강 역사문화홍보 전시관 설계 및 제작물 제작‧설치

용역 변경계약 검토

한강사업총괄부장 :윤석환☎3780-0865 한강문화관광과장 :안신훈☎0765 담당 : 김세정☎0796

한강 역사문화홍보 전시관과 관련하여 자벌레 전층을 가족친화공간으로 통일성 있게 조성하기 위해 과업을 추가하는 변경계약을 검토하고 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 한강 역사문화홍보 전시관 설계 및 제작물 제작‧설치 용역

ㅇ 용역기간 : ’22. 5.25. ~ ’23.12.10. (장기계약)

ㅇ 계약금액 : 총1,275,000천원

ㅇ 계약상대자 : ㈜플러스스페이스 (대표 : 정성은) 외 1

ㅇ 주요내용 : 전시관 기본구상 및 설계, 제작물 제작 및 설치

□ 추진경위

ㅇ ’22. 5.25.	계약 체결

ㅇ ’22. 7. ~ 10.	착수 보고 및 중간 보고 (자문회의)

*******************************************

****************************************

*******************************************

ㅇ ’22. 8. ~ 12.	’23년 본예산 편성

※ 3층 공간 조성 및 외부 안내사인물 설치 예산 추가 확보

****************************************

******************************

***************************************

****************************** *1~2층 공간개선 최종 결정

□ 추진방향

ㅇ 시설 전 층의 통일성 있는 기획 및 3층 활용해 누구나 이용할 수 있는 개방 공간 마련

ㅇ 뚝섬한강공원에서 시설로의 접근을 유도하고 효과적으로 안내할 수 있는 사인물 설치

□ 과업추가 및 계약변경 내용

**********

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 검토의견

***************************************************************************

***********************************************************

□ 협조사항 및 향후일정

ㅇ 협조사항 : 총무과 - 변경 계약 체결

- 예산과목 : 한강공원시설 관리 및 개선, 뚝섬 전망문화복합시설 운영 및 관리, 시설비

ㅇ 향후일정(안)

- ’23.10월	계약변경 의뢰 및 체결

- ’23.12월	준공 예정

※ 붙임 :*********************** 각 1부.  끝.