문서번호	물재생시설과-14503
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장	물순환안전국장
김찬중	장태옥	김윤수	10/25
			임창수

「안정적 전력수급망 구축을 위한」

주전기실 기본 및 실시설계 사업계획

2023. 10.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「안정적 전력수급망 구축을 위한」

주전기실 기본 및 실시설계 사업계획

2040 하수도 정비 기본계획 추진에 따라 안정적 전력수급망 구축을 위하여 주전기실을 확충하고자함

Ⅰ		추진배경

□ 향후 시설증대에 따른 전력수급 계획 수립

ㅇ 총인처리시설, 슬러지 건조시설, 분뇨처리지하화, 복개공원화 등

－ 2028년까지 기존 계약전력 ******************* 용량증설 필요성 대두

□ 그린벨트(GB) 변경 계획에 맞춰 시설계획 수립

ㅇ 난지물재생센터 GB 관리 변경 용역 일정에 따른 GB 변경 신고 추진

－ 센터 내 전기실 배치도, 전력수급량, 기본계획 등 한전측과 용량검토 필요

Ⅱ		추진현황

□ 난지물재생센터 현황

ㅇ 시설용량 : 86만[eqn: m ^{3}]/일(경기도 고양시 소재)

*********

***********************************************************************************************************************************************************************************************

********************

*******************************

*********************************************

*************************************************************

************************************

******************************************

*************************************************************************

Ⅱ		추진계획

□ 추진근거

ㅇ 2040 하수도 정비기본계획 및 기타 시설개선 추진

－ 총인처리시설, 슬러지건조시설, 분뇨처리지하화, 복개공원화 등 수전설비 증가

ㅇ 전기사업법 시행령 제5조의 5(전기공급의 거부 사유)

－ 계약전력 10,000kW 이상의 경우 사용예정일 2년 전 공급 요청하여야 함

□ 추진방법

ㅇ 난지물재생센터 내 주전기실 건축물 신설

ㅇ 시설 및 수전설비의 적정용량 산정을 위한 기본설계 용역 추진

	< 추 진 경 과 >
ㅇ '22. 11. : 기존계약전력 증설 요청 － 총인처리용 증설 신청(11,000kW → 13,950kW 신청) ㅇ '23. 1. : 전력증설을 위한 한전 마포용산⋅고양지사 협의 － 대용량전용선로 공급가능 여부 등 협의 ㅇ '23. 2. : 사업별 전력수요량 산출서 조사(회의) － 사업별 수전용량 재산정(동해종합기술공사 외 4개사) ㅇ '23. 5. 4. : 전력수전예정통지에 따른 공급방안 검토결과 알림(한전) － 능곡 S/S 주⋅예비 대용량 배전방식 2회선 신설하여 20,000kW 공급가능

Ⅱ		추진계획

□ 세부추진 계획

ㅇ 사 업 명 : 난지물재생센터 주전기실 신설 기본 및 실시설계

ㅇ 사 업 비 : ******

ㅇ 예산조치 : 2024년도 사업예산 편성(예산과목 : 시설비)

ㅇ 사업내용

－ 주전기실(520[eqn: m ^{2}]) 신설 기본 및 실시설계

－ 난지물재생센터 전력공급계획(32,600kW) 수립

－ GB 변경 관리 계획 내 반영 추진

ㅇ 추진일정

1 단 계		2 단 계		3 단 계
주전기실 기본 및 실시설계 (2024)		난지물재생센터 주전기실 신설 (2025)		단계별 계약전력 증설 (2025~2028)

□ 연차별 투자 계획(안)

단위 : [백만원]

단위사업	계	2024	2025	2026	2027
계	******	***	*****	******	******
난지물재생센터 주전기실 신설 기본 및 실시설계 용역	***	***	*	*	*
난지물재생센터 주전기실 공사	*****	*	*****	*	*
대용량 배전선로 신설 및 표준시설부담금 납부	******	*	*	******	******

※ 2040 하수도 정비 기본계획 반영예정

□ 기대효과

ㅇ 난지물재생센터 내 안정적 전력공급

－ 적정시기 전력공급을 통한 시설개선사업 추진력 확보

－ 물재생센터내 충분한 전력확보로 안정적 운영 도모

Ⅳ		향후계획

□ 행정사항

ㅇ 한국전력공사, 난지물재생센터 등 유관기관 협의

ㅇ 그린벨트(GB) 관리계획 용역 내 반영 추진

□ 향후계획

ㅇ ’23.10. : 기술용역 타당성 심사

ㅇ ’24. 1. : 용역 발주 심의 및 발주.

따로 붙임 : 1. 난지물재생센터 향후 전력수요량 1부.

2. 전기실 신설 세부 시행계획 1부.  끝.

참 고 1		난지물재생센터 향후 전력수요량

*****************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************

**************************

******

참 고 2		전기실 신설 세부시행 계획

□ 주 전기실 신설(안)

**************************************

******

**********

**************************************************************************************

*************************************************

********************************************************

******