건설공사 설계변경 사전심의

설계변경 사전 심의서(가락공동구 대체관로 구축공사)

공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	김 병 국
제 출 일	2023. 10. 24.

심의 위원회 의견
- 심의일시: 2023. 10. 24.(화)
- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이
의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

이규희

10/25

타당함

이규희

위    원

급수운영팀장

양재덕

양재덕

타당함

위    원

시설운영팀장

양봉우

양봉우

타당함

위    원

급수관리팀장

김종섭

김종섭

타당함

위    원

안전관리팀장

강희창

강희창

타당함

담    당

주무관

김병국

김병국

설계 변경 사전심의 설명서

□ 공사현황

○ 공사명: 가락공동구 대체관로 구축공사

○ 공사기간: 2023. 4. 20.~2023. 10. 31.

○ 공사개요: D=150~300㎜, L=600m

○ 도급액: 금365,787,590원

○ 발주청: 강동수도사업소(급수운영과)

○ 계약자: ㈜지승유지스 대표 고효석

○ 감독자: 서울시설공단 유현석

□ 설계변경 사유

1) 설계변경 시행 근거

○ 공사 실정보고(공사현장 상태와 설계서 상이로 인한 변경)

연번	구분(제목)	주요 변경내용	관련근거
1	1차 실정보고	1) 잔토처리 추가 - 잔토처리 누락으로 신규공종 추가	•공사감독2처-10878 (2023. 09. 13.) •급수운영과-15653 (2023. 09. 20.)
2	2차 실정보고	1) 관로선형, 분기부 변경 및 밸브 위치 조정 2) 기존 밸브실 재설치	•공사감독2처-12051 (2023. 10. 06.) •급수운영과-16508 (2023. 10. 10.)
3	3차 실정보고	1) 종점부 연결불가 - GIS도면과 현장상이로 연결불가 → 발주청 D150/150 부단수분기 시행 회신	•공사감독2처-12227 (2023. 10. 10.) •급수운영과-16706 (2023. 10. 12.)
4	4차 실정보고	1) 시험굴착 개소 증가	•공사감독2처-12517 (2023. 10. 13.) •급수운영과-17136 (2023. 10. 19.)

○ 제경비 등 실 사용에 따른 정산 및 제비율 변경

연번	구분(제목)	주요 변경내용	비고
1	4대 보험료 등 정산	1) 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금, 건설기계대여대금 정산 2) 산업안전보건관리비, 환경보전비 실 사용 정산
2	기타경비 요율 조정	1) 기타경비 요율 변경(8.4% → 6.7%)

?? 주요공정 변경 내역

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
관부설(야간)	D150∼300㎜	m	600	597	감) 3
밸브실 설치	D80∼300㎜	개소	13	15	증) 2

□ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ‧ 감
도급비	공급가액	332,534,173	309,345,455	감)23,188,718
	부가가치세	33,253,417	30,934,545	감) 2,318,872
	계	365,787,590	340,280,000	감)25,507,590

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경(정산) 검토보고(공단) 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.