문서번호	설비부-16773
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비총괄과장	설비부장
이승준		장병선	10/25
			代장병선
협조

「가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립 소방공사(1차)」 준공기한 연장 및 계약변경 검토보고

「가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립 소방공사(1차)」

준공기한 연장 및 계약변경 검토보고

2023. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립 소방공사(1차)」

준공기한 연장 및 계약변경 검토보고

『가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립 소방공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출 된 준공기한 연장 및 계약변경 건에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 준공기한 연장 및 계약변경 요청***************************

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립 소방공사

ㅇ 위    치: 송파구 가락동 600, 가락시장 북3문 인근

ㅇ 규    모: 지하1층/지상5층, 연면적 2,949㎡

ㅇ 계약현황

계약자	구 분	계약금액(원)	계약기간
********	총 차	425,458,000	2022.12.1. ~ 2024.9.30.
	1 차	20,000,000	2022.12.1. ~ 2023.10.31.

ㅇ 감 리 사: *************

□ 검토내용

ㅇ 계약변경 사유

- ***********************************

- *****************************************

ㅇ 정산내용

(단위 : 원)

항 목	계약금액	정산금액	증·감	비 고
재료비	*********	*********	*
노무비	*********	*********	*
경비	*********	*********	***************	******
일반관리비	*******	*******	***************
이윤	*********	*********	***************
고용개선지원비	*********	*********	***************	*******
배상책임공제료	*********	*********	*
부가가치세	*********	*********	***************
합계	**********	**********	***************	******

ㅇ 계약 변경 내역

구 분		당 초	변 경	증․감
계약기간	총차	'22.12.1. ~ '24.9.30.	**	****
	1차	'22.12.1. ~ '23.10.31.	**********************	*******
계약금액	총차	425,458,000	***********	***********
	1차	20,000,000	**********	***********

□ 건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ *****************************************************************************************

□ 보고자의견

ㅇ ********************************************************************

붙임 감리단 보고서 1부.  끝.