아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(가락공동구 대체관로 구축공사)

우리 사업소에서 시행하고 서울시설공단에 위탁 감독 중인 상수도 공사의 설계변경 심의회를 개최하고 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

나. 계약상대자: (주)지승유지스   대표 고 효 석

다. 공사기간: 2023. 4. 20. ~ 2023. 10. 31.

라. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비,상수도블록시스템공급체계구축

마. 변경사유: 물량 증·감,신규공정 발생, 제경비(4대보험료 등) 정산 등

바. 변경내역

(단위: 원)

구분	금액
	당초	변경	증·감
도급비	***********	***********	*****************

붙임  1. 설계변경 사전심의 결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 검증확인서 각 1부.  끝.

2023. 10. 26.

감추산

행정지원과

주무관	김병국		주무관	代방혜은		주무관	박지숙		급수운영팀장	양재덕
급수운영과장	이규희		강동수도사업소장	10/26
유재명
협조자	주무관	송정호
시행	급수운영과-17644	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(7)