문서번호	도시철도설비부-10533
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
박서영	배광희	10/25
		전계목

물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

2023. 10.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

「위례선 트램 차량 구매」

물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 보고

도시철도설비부장 : 전계목☎6438-2708 차량과장 : 배광희☎2730 담당 : 박서영☎2735

「위례선 트램 차량 구매」 물가 변동에 의한 계약금액 조정과 관련해 조정금액을 재산출하였으며 검증 전문기관의 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		차량구매 개요 및 진행경위

□ 차량구매 개요

ㅇ 차량형식 : 무가선저상트램(배터리 지붕탑재형)

ㅇ 편 성 수 : 10편성(운영 8, 예비 2)

ㅇ 계약기간 : ’21.12.15.~’25.08.26.(시운전기간 포함)

ㅇ 계약금액 : 38,078,594천원

ㅇ 계약상대자 : 우진산전(주)

□ 진행경위

ㅇ ’21.12.15. : 트램 차량 구매 계약 체결(9편성)

ㅇ ’22.04.04. : 1편성(증) 변경계약 완료

ㅇ ’23.02.06. : 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청(차량제작사→본부)

구 분	계약금액(A)	물가변동 조정액(B)	변경계약액(A+B)
***********	**************	****************	**************

ㅇ ’23.03.16. : 계약금액 조정 검증용역 계약체결(한국기업연구원)

ㅇ ’23.06.07. : 변경계약 의뢰(본부→조달청)

ㅇ ’23.09.21. : 변경계약 반려 및 물품계약 수정 통보(조달청→본부)

ㅇ ’23.09.22. : 조정 수정 및 재요청 접수(****************)

구 분	계약금액(A)	물가변동 조정액(B)	변경계약액(A+B)
***********	**************	****************	**************

Ⅱ		추진근거 및 검토결과

□ 추진근거

ㅇ 지방계약법 시행령 제73조(물가 변동으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행안부 예규 제252호, ’23.7.1.)

□ 전문기관(한국기업연구원) 검토결과

ㅇ ******************************************

<기존 내역>

(단위 : 천원)

구 분	조정기준일	조정율	조정 전	조정 금액	조정 후	비 고
****	********** *******	*	**********	*********	**********	*** *****
****	**********	*****	**********	************	**********	****
****	**********	*****	**********	**********	**********	****

<수정 내역>

(단위 : 천원)

구 분		조정기준일	조정율	조정 전	조정 금액	조정 후	비 고
****		**********	*****	**********	************	**********	***
	****	********** *******	*****	*********	**********	**********	** ***
****		**********	*****	**********	**********	**********	****

*********************************

ㅇ 재산출 경위

*******************************************************

****************************************************************

***********************************

*********************************************************************************

Ⅲ		향후계획

□ 향후계획

ㅇ ’23.10월 : 변경계약 재요청(본부 → 조달청)

붙임 : 계약금액 조정 종합의견서(검증 보완) 1부  끝.