문서번호	도로관리과-6804
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	도로관리과장
조우성		조성건	10/25
			代윤인식
협조
	보도환경팀장		김기용

｢보행환경개선 디자인 제작｣

계약변경 검토보고

2023.  10.

도 로 관 리 과

｢보행환경개선 디자인 제작｣

계약변경 검토보고

‘거리가게 디자인 가이드라인’ 재심의에 따라 ｢보행환경 개선 디자인 제작｣ 사업의 준공기한 연장을 위한 계약변경 내용을 보고드림

□ 추진 근거

ㅇ 서울도심 중심지역 보행환경 개선 추진계획 [행정2부시장 방침 제75호(’23. 3. 31.)]

ㅇ 보행환경개선 디자인 제작 추진계획 [도로관리과-7427(’23. 4. 21.)]

□ 추진 경위

ㅇ ’23. 6. ~    : 보행환경개선 조감도·사진 디자인 작업, PPT 제작 등 추진

ㅇ ’23. 10. 12. : ‘거리가게 디자인 가이드라인’ 공공디자인 진흥위원회 심의

- 심의결과(10. 20.) : 재심의

□ 사업 개요

ㅇ 과 업 명 : 보행환경개선 디자인 제작 용역

ㅇ 계 약 자 : 아트앤트레이드

ㅇ 계약금액 : 금37,999,500원정(금삼천칠백구십구만구천오백원정)

ㅇ 과업기간 : ’23. 5. 30. ~ ’23. 10. 31.

ㅇ 과업내용

- 보행환경개선 대상지 현장조사 및 분석

- 보행환경개선(안)에 대한 디자인 기준 준수 여부 검토

- 사업추진 관련자료 PPT 및 영상자료 제작

- 보행환경개선 사례 디자인 제작

- 거리가게 디자인(안) 신규 개발

□ 검토 내용

ㅇ 변경내용 : 준공기한 연장

- (당초) ’23. 10. 31. ⇒ (변경) ’23. 11. 30. (총 30일, 계약금액 변동없음)

ㅇ 변경사유 : ‘거리가게 디자인 가이드라인’ 재심의 의결에 따른 연장

- ‘제18차 서울시 공공디자인 진흥위원회(’23. 11. 10.)’에 재심의 상정 예정으로, 심의 일정상 기존 준공기한으로 계약 내용 완수 불가

ㅇ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 공정계획 변경으로 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후 계획

ㅇ ’23. 11.  1. : 심의자료 제출

ㅇ ’23. 11. 10. : 재심의        ※ 제18차 서울시 공공디자인 진흥위원회

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.