문서번호	급수운영과-17588
보존기간
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김병국		양재덕	10/26
			이규희
협 조

설계변경 심의결과 보고

(가락공동구 대체관로 구축공사)

2023. 10. 25.(수)

강동수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과 보고

가락공동구 대체관로 구축공사에 대한 설계변경 심의를 완료하고 그 결과를 보고함.

□ 설계변경 개요

가. 공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

나. 공사기간: 2023. 4. 20. ~ 2023. 10. 31.

다. 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구분	당초	변경	비고
도 급 비	***********	***********	***************

□ 심의내용

가. 일  시: 2022. 10. 24.(화)

나. 심의자: 급수운영과장 외 4명

다. 심의내용

- 공종별 물량 증감에 따른 계약금액 조정 타당성 검토

- 신공종 발생에 따른 일위대가 산정의 타당성 검토

- 제경비 실정산에 따른 계약금액 조정 검토

□ 심의결과

ㅇ 설계변경 타당함.

□ 향후계획

ㅇ 상기사항을 반영하여 설계변경을 시행하고 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의의견서 1부.

3. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.