문서번호	공원시설과-3348
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	공원시설과장
신승민	전결 10/26
	양돈욱

여의도 수영장 카페테리아 보수공사

준공기한 연기 검토보고

2023. 10.

공  원  부

(공원시설과)

준공기한 연기 검토보고

여의도 카페테리아 보수공사 시행 중 계약 내역 오류 수정 등 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 준공기한 연기하고자 함.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 여의도 수영장 카페테리아 보수공사

ㅇ 공사기간 : 2023. 10. 12. ~ 10. 26.

ㅇ 공사내용 : 카페테리아 천장 철거 및 재설치

**********************

*************************

□ 준공기한 연기 검토내용

ㅇ 준공기한 연기

- 기존 : 2023. 10. 12. ~ 10. 26.

- 기존 : 2023. 10. 12. ~ 11. 03. (8일 연기)

****************************************************************

*******************

□ 보고자 의견

************************************************

붙임 : 합의각서 1부.  끝.