문서번호	식품의약품부-11746
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생활보건팀장	식품의약품부장		보건환경연구원장
이인숙	이정숙	代김현정		10/26
				신용승
협 조
	운영기획부장		이미경
	시설관리팀장		이정연
	총무팀장		김종초

식품 방사능 검사 실험실

확대 구축 계획

2023. 10. 25. (수)

보건환경연구원

(운영기획부/식품의약품부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

식품 방사능 검사 실험실 확대 구축 계획
식품의약품부장 : 황인숙☎570-3211	생활보건팀장: 이정숙☎3245	담 당:이인숙☎3246
운영기획부장: 이미경☎570-3339	시설관리팀장: 이정연☎3347	담 당:김현철☎3346

식품 방사능 검사 확대에 따른 정밀 방사능 분석기기 추가 확보(예정)에 따라 방사능 검사 실험실(방사능 분석실, 전처리실 등) 확대 구축으로 원활한 식품 방사능 안전관리 검사를 수행하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업명 : 식품 방사능 검사 실험실 확대 구축

□ 필요성

ㅇ 식품 방사능 오염에 대한 시민 불안감 해소 및 과학적 자료에 기반한 신속하고 정확한 안전 정보 제공

ㅇ 일본 후쿠시마 방사능 오염수 해양 방류에 따른 수산물 안전성 확보를 위한 방사능 정밀검사 확대 및 강화

ㅇ 정밀 방사능 분석기기 추가 확보(예정) 따른 방사능 검사 실험실(방사능 분석실) 확대 및 방사능 전처리실 시설 구축 필요

□ 사업 근거

ㅇ 서울시 방사능 안전관리 강화계획(식품정책과-22400, '23.8.30.)

ㅇ 식품 방사능 안전관리 강화를 위한 예비비 사용계획

(식품정책과-22557, '23.8.31.)

ㅇ 방사능 대책 검사 확대 운영 계획(운영기획부-11812, '23.8.31.)

ㅇ 방사능 검사 확대에 따른 부서 운영계획(식품의약품부-9430, '23.9.1.)

ㅇ 식품 방사능 검사장비 시스템 긴급구매 계획(식품의약품부-9451, '23.9.4.)

Ⅱ		식품 방사능 검사 실험실 확대 구축 계획

□ 예산 현황 ********************

사 업 명	소요예산 (천원)	예 산 과 목
식품 안전성 검사 (자체)	********	보건환경연구원 효율적운영, 식·의약품 검사 강화, 식품 안전성 검사(자체), 공공운영비

□  방사능 분석실 확대 구축 계획

ㅇ 정밀 방사능 분석장비 운영 현황(안)

	2023.9 (기존 장비)	2023.12. (기존 장비 + 추가 확보)	비 고
식품의약품부 (생활보건팀)	*****	****** *********************	방사능 분석실 확대 구축
강남농수산물검사소 (수산물검사팀)	*****	*****

ㅇ 방사능 분석실 확대 구축 일정(안)

방사능 분석실 확대 공간 확보	➡	안전진단 보강공사* (*필요시)	➡	내부 건축 전기, 통신, 공사	➡	방사능 전처리실 시설 구축 및 실험실 재배치
’23. 9.		’23.10.~11.		’23.10.~12.		’23.10.~12.
운영기획부 /식품의약품부		식품의약품부 (*운영기획부)		운영기획부		식품의약품부

Ⅲ		세부 추진계획

□  방사능 분석실 확대 구축을 위한 공간 확보

ㅇ 방사능 분석실 확대 공간

기존) 신관 A동 1층 방사능 분석실 → 변경) 신관 A동 1층 이화학실험실

※ 기존 방사능 분석실은 방사선조사 실험실로 재배치

ㅇ 방사능 전처리 실험실

기존) 신관 A동 1층 이화학실험실 → 변경) 신관 A동 1층 통합 방사능전처리실

		기 존	변 경(안)	비고
방사능 분석실	위치	신관 A동 1층, 방사능 분석실 (생활보건팀)	신관 A동 1층, 이화학실험실 (생활보건팀)	※ 안전진단 후 필요시 하중보강
	면적	*******	*******
	방사능 분석장비	*****	***** *********************
방사능전처리실험실 통합설치	위치	신관 A동 1층, 이화학실험실/ 전처리실 (생활보건팀)	신관 A동 1층, 통합 방사능전처리실 (생활보건팀)	※ 방사능 전처리실 시설구축 및 이화학실험 통합이용 재배치
	면적	******** *****************	*******
	방사능 전처리 장비	******** ************ ********* ************ ************ **********	******** ************ ********* ************ ************ **********

ㅇ 추진일정 : '23. 9. ~ 10.

ㅇ 시행부서 : 운영기획부 시설관리팀, 식품의약품부 생활보건팀

□  방사능 분석실 확대 구축 관련 안전 진단

ㅇ 추진일정 : '23. 10. ~ 11.

ㅇ 추진내용 : 확대 방사능 분석실 장비 설치 관련 하중 안전 진단

****************************************************

ㅇ 소요예산(안) :***************************

ㅇ 시행부서 : 식품의약품부 생활보건팀

ㅇ 협조부서 : 운영기획부 시설관리팀

□  (필요시)방사능 분석실 확대 구축 관련 하중 보강 공사

ㅇ 추진일정 : '23. 10. ~ 12.

ㅇ 추진내용 : 안전진단 결과에 따라 확대 방사능 분석실 하중 보강 공사

ㅇ 소요예산(안) : ***************************

ㅇ 시행부서 : 운영기획부 시설관리팀

□  내부 건축, 전기, 통신 시설 공사

ㅇ 추진일정 : '23. 10. ~ 12.

ㅇ 추진내용 : 확대 방사능 분석실의 전기, 통신, 내부 시설공사

- 내부 건축(바닥, 벽, 천장) 등

- 전기(조명), 통신 시설공사

ㅇ 소요예산(안) : *************

ㅇ 시행부서 : 운영기획부 시설관리팀

□ 방사능 전처리실 시설 구축 및 실험실 통합 재배치

ㅇ 추진일정 : '23. 10. ~ 12.

ㅇ 추진내용

(이화학실험실 → 변경(안) 확대 방사능분석실 )

- 실험실용연기후드및찬장(흄후드)*************

- 기존 실험대 및 이화학 장비 이동, 재배치

- 정밀 방사능 분석 장비*******배치 및 관련 시설 설치

(전처리실 → 변경(안) 통합 방사능전처리실)

- 기존 실험대 구조 변경 및 재배치

- 방사능 전처리 구역 배기 시설 설치

- (시료/시약창고) 시약장, 앵글, 실험대 등 이동 재배치

※ 기존 이화학실험실, 전처리실의 장비 및 기구 이동으로 전처실 내  시료/시약창고 이용 변경 필요

(방사능분석실 → 변경(안) 방사선조사 실)

- 기존 실험대 재배치 및 관련 장비, 기구 이동

- 항온항습기(에어컨) 등 이동 재배치 등

(공통사항)

- 실험실 내 장비, 실험 기구 이동으로 관련 물품 재배치

ㅇ 소요예산(안) : ***********

ㅇ 시행부서 : 식품의약품부 생활보건팀

□  기타사항

ㅇ 상황에 따라 실험실 재배치(안), 소요예산(안) 및 일정(안) 변경 가능

Ⅳ		기 대 효 과

ㅇ 일본 방사능 오염수 방류 관련 수산물 등 방사능 안전성 검사 확대와 방사능 검사 대응 역량 강화로 효율적인 검사 수행

붙임 1. 방사능 실험실 확대 구축 관련 실험실 이용(안) 배치도.  끝.