문서번호	토목과-14327
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		토목팀장		토목과장	안전건설교통국장
이기웅		김경원		성규상	10/26
					신용철
협조
	교통지도과장		임경남
	통신보안팀장		함정은
	주차기획팀장		박정숙

금호동1가 636번지 공영주차장 건립공사 발주계획보고

금호동1가 636번지

공영주차장 건립공사 발주계획보고

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [√] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [ ] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

금호동1가 636번지

공영주차장 건립공사 발주계획보고

금호동 일대 주차난 해소를 위한「금호동1가 636번지 공영주차장 건립 기본 및 실시설계용역」이 완료되어 공사 발주계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 금호동 일대 주차장 확충 종합계획(교통지도과-36585, ‘22.12.26.)

○ 금호동1가 636 공영주차장 건립계획(교통지도과-2068, ‘23.1.26.)

□ 사업개요

○ 공 사 명: 금호동1가 636번지 공영주차장 건립공사

○ 위    치: 금호동1가 636번지

○ 사업기간: 2023.11. ~ 2023. 4.

○ 규    모: 2단 자주식 주차장 33면 조성

○ 사업예산: 1,800,000천원(구비 900,000/시비 900,000)

※ 사업비 중 시비는 23년 확보완료, 구비는 24년 확보 예정으로 장기계속공사로 시행

□ 추진경위

○ 2023.  1.26.: 건립계획 방침수립(교통지도과-2068)

○ 2023. 2.~4.: 서울시 투자심사대상 여부 협의(교통지도과)

○ 2023. 5.  4.: 설계용역 계약

○ 2023.10.  4.: 설계용역 준공

○ 2023.10. 18.: 서울시 계약심사 의뢰

□ 발주계획

○ 사업예산: 공영주차장조성 및 유지관리/시설비 및 부대비/시설비(교통지도과)

(단위:천원)

계	용역(설계비)	공사비
1,800,000	52,250	1,747,750

○ 분야별 설계금액(공사금액)                            (단위:천원)

구 분	계	도급비	관급비	이전비 등	비고
계	1,747,750	1,127,858	100,607	519,285
건축(토목·기계)	1,298,035	786,154	16,406	495,475
전기	160,571	105,820	30,941	23,810
소방	219,824	219,824
통신	69,320	16,060	53,260

○ 공사기간: 착공일로부터 180일

○ 발주방법

- 건축(토목·기계): 제한경쟁(지역제한)

- 전기, 소방: 전자공개수의

- 정보통신: 수의계약

□ 향후계획

○ 2023. 10.: 공사발주

○ 2023. 11.: 공사계약 및 착공

○ 2024.  4.: 공사준공(예정)

□ 행정사항

○ 교통지도과: 예산운영 등 사업총괄, 민원처리

○ 토  목  과: 건축(토목·기계)공사, 전기공사, 소방(전기·기계)공사 발주 및 감독

○ 정보통신과: 통신공사 발주 및 감독

붙임  관련방침서 2부.  끝.