문서번호	기획관리과-10177
결재일자	2023. 10. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박필관		조윤홍	10/26
			추경수
협조

데이터센터 리모델링 설계용역 추진계획

2023. 10.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

데이터센터 리모델링 설계용역 추진계획

데이터센터의 취약한 구조물을 보강하고, 향후 시스템실을 확충하기위한 리모델링 설계용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 데이터센터 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료결과(기획관리과-9225, '23.9.25.)

❍ 현재 구조적으로 취약한 부분이나, 향후 시스템실로 활용될 곳의 구조보강을 실시하는 것이 타당

□ 서울시 데이터센터 발전방향 ISP(Ⅲ. 목표모델 수립, '21.10. 1.)

❍ 1층 및 2층을 전산실로 활용하기 위해서는 적극적인 면진 및 내진대책 필요

❍ 기존 구역의 활하중을 수용하기 위해 구조 보강 필요

Ⅱ		추진경위

□ 2023. 4. 11. : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 방침 수립

□ 2023. 5. 30. : 용역 계약 체결 및 착수

□ 2023. 8. 9. : 내진성능평가를 위한 지반조사 용역 별도 실시(~'23. 9. 7.)

□ 2023. 9. 26. : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 준공

❍ 구조보강(안) : 보 및 슬래브 보강하여 일부 부재의 안전성 확보 필요

❍ 내진보강(안) : 일부 벽체·모서리에 철골가새 보강 필요

Ⅲ		추진방향

□ 구조정밀안전진단 결과의 보수·보강방안을 반영하여 전체적인 구조

안전성 확보

(지붕층은 슬래브 탄소섬유 보강, 지상1층 ~ 3층은 보 철판보강 필요)

□ 「서울시 데이터센터 발전방향 ISP」을 참고하여, 1층 교육장 및 2층 스마트워크센터의 개축에 준하는 리모델링을 통하여, 시스템실의 기능을 가진 여유공간 확보

(평면의 효율적인 재배치, 이중마루, 방수천장, UPS, 항온항습기, 소방시설 교체설치 등)

▶ 기본구상안에서 제시된 계획안을 반영하되, 현장여건의 등 상황의 변화에 따라서 계획안이 변경될 수 있음.

Ⅳ		사업대상 현황

□ 건축규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 9,090.18㎡

□ 용  도  : 공공업무시설

□ 준공년도 : 1994.10.19.

□ 현  황

❍ 정밀안전진단 결과

- 기 발생한 균열(폭0.1~0.3mm 이하)/누수흔적/백태/이질재이격/재료분리/콘크리트 박리/박락/시공 불량/철근노출 등의 결함의 경우 대다수가 콘크리트의 재료적 성질(건조수축, 온도응력), 개구부 응력집중, 이질재 접합부(콘크리트+조적), 공용 연수 증가에 따른 건축물의 노후화, 피복두께 부족, 시공시 다짐불량 등의 복합적인 요인에 의해 발생하였으며,

- 건축물의 사용성 및 내구성 확보 등을 고려하여 적절한 보수조치 필요(주요·보조 부재에 결함이 발생하였으나 전체적인 건축물의 안전에는 지장이 없으며, 내구성 및 기능성 저하 방지를 위한 보수·보강 필요)

<옥탑 지붕층 구조보강 위치도>	<지붕층 구조보강 위치도>	<지상1~3층 구조보강 위치도>

❍ 현 시스템실 내 랙 장비 상면 부족으로 인한 신규 시스템실 확충 필요

- 시스템실 랙 설치 현황

구 분	총 설치가능 랙	설치 랙 (설치불가 랙 포함)	여유 랙
서초 데이터센터	337(100%)	287(93.5%)	22(6.5%)

Ⅴ		용역개요

□ 용 역 명 : 데이터센터 리모델링 공사 설계용역

□ 위    치 : 서울특별시 서초구 남부순환로340길 49

□ 기    간 : 2024. 2. ~ 6.(착수일로부터 120일)

□ 규    모 : 지하1층 / 지상4층 (연면적 9,090.18㎡)

□ 과업내용

○ 공간 내부의 설계에 필요한 각종 측량 등 현장조사

○ 시스템실 공간 조성에 관한 기본 및 실시설계

○ 용역계약서 및 과업지시서에 따른 공사발주를 위한 설계도서 작성

○ 리모델링 공사, 가구 설치 관련 자문 및

○ 리모델링 사업비 및 공사기간 산정

○ 세부 공사시행에 대한 자문 및 발주기관이 정하는 사항 등

□ 용 역 비 : 100백만원

□ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰참가자격

- 주된 영업소가 서울시에 소재하고, 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제28조 및 동법 시행령 제23조에 의거 건축

□ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적운영, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

Ⅵ		행 정 사 항

□ 1층 IT 교육장 철거 및 시스템실 개축 관련 협의(인재개발원)

□ 2층 스마트워크 철거 및 시스템실 개축 관련 협의(인터넷통신과)

□ 용역진행기간중 과업내용 및 진행에 대해 통신·시스템실 담당직원 협조 등

Ⅶ		향후 추진계획

□ 2024. 2.  : 설계용역 시행  및 계약

□ 2024. 2. ~ 6.  : 설계용역 착수 및 준공

붙 임:   1. 설계내역서 1부.  끝.