아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	「별관 정밀안전진단 용역」 준공기한 연장 요청

1. 관리단속과-14003(23.10.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인「별관 정밀안전진단 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 요청드립니다.

가. 계약건명 : 별관 정밀안전진단 용역

나. 계약업체 : (주)백양엔지니어링

다. 계약금액 : 금19,300,000원

라. 변경사항(준공기한 변경내역)

계약금액	당 초	금 19,300,000원
	변경후	금 19,300,000원
	증․감액	없음
계약기간	당 초	2023.8.9.~2023.10.26.
	변경후	2023.8.9.~2023.11.9.

※ 계약금액 및 설계내역 변동없음.

마. 연장사유 : 발주기관 필요에 의한 준공기한 연장

- 별관 정밀안전진단 과업결과보고서 추가 검토 요청에 따라 과업준공까지의 절대공기	가 부족함으로 인하여 준공기한을 연장하고자 함.

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연장 보고서 1부.

2. 준공기한 연장 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관	정명준		주무관	이상희		관리단속과장	10/26
이우승
협조자
시행	관리단속과-14006	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, 북부도로사업소	/	ush.seoul.go.kr
전화	02-944-5413	/전송	02-945-5071	/	jmj9999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)